포 스 코 엔 지 니 어 링 우편번호:07200 서울특별시 영등포구 양화동 153-2 TEL:02)302-0675 FAX:02)302-0676 담당 : 형병호 부장
문서번호	: 월드컵(감리)2016-147호	선결	토목부장			지시
작 성 일	: 2016. 04. 26.
		접수	날짜			결재 ㆍ 공람	토목총괄과장
경 유	:
			번호
수 신	: 서울특별시 도시기반시설본부장
		처리부
참 조	: 토목부장
		담당자
제 목	: 월드컵대교 건설사업관리기술자(강교) 투입계획 승인요청

1.삼건월드컵 2016-176호(2016.04.22)와 관련된 문서입니다.

2.월드컵대교 건설공사중 『삼성물산(주)』로부터 강교제작 및 가설 예정공정표가 접수되어 검토 완료 하였으며, 강교 건설사업관리기술자를 투입하여 품질관리에 만전을 기하고자 붙임과 같이 투입계획을 보고 드리오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙   임 : 1. 강교 건설사업관리기술자 투입계획 검토의견  1부.

2. 시공사 공문사본                            1부    끝.

월드컵대교 건설공사 건설사업관리용역

책임건설사업관리기술자  김 창 욱 (인)

(주)포스코엔지니어링 (주)동일기술공사	감리 검토의견서	2016. 04
공 사 명	월드컵대교 건설공사
검 토 건 명	건설사업관리기술자(강교) 투입계획 승인요청

▢ 공사개요

○ 공 사 명  : 월드컵대교 건설공사

○  개    요 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km

○  도 급 액 : 177,008백만원

○  공사기간 : 전체 : 2010.03.22 ~ 2020.08.31(126개월)

○  시 공 사 : 삼성물산(주) 외 2개사

○  감 리 사 : (주)포스코엔지니어링 외 1개사

▢ 강교 건설사업관리기술자 투입사유

월드컵대교 건설공사중 시공회사인 『삼성물산(주)』 강교제작 및 가설공사에

대한 계획이 수립되어 원활한 공정추진을 위해 강교 건설사업관리기술자        투입하여 품질관리에 만전을 기하고자함.

▢ 관련근거

삼건월드컵 2016-176호(2016.04.22) 강교제작 및 가설공사 예정공정표 제출

▢ 강교제작 및 가설공사 예정공정표

▢ 강교제작 및 가설 일정표

구 분		일 정	비 고
shop dwg. 작성	1 차	‘16.04월 ~ ‘16.07월	주경간교
	2 차	‘16.07월 ~ ‘16.10월	북단 접속교 및 연결로
	3 차	‘16.10월 ~ ‘17.01월	남단 접속교 및 연결로
shop dwg. 검토 및 승인	1 차	‘16.06월 ~ ‘16.08월	강교 보조감리원 투입(‘16.6.1)
	2 차	‘16.09월 ~ ‘16.11월
	3 차	‘16.12월 ~ ‘17.02월
관급자재(강판) 신청 / 반입	1 차	‘16.04월 / ‘16.08월	주경간 MP9~MP11
	2 차	‘16.10월 / ‘17.02월	주경간 MP5~MP9
	3 차	‘17.04월 / ‘17.08월	남단접속교, 주경간 잔여, 남단 연결로 R-A
	4 차	‘17.11월 / ‘18.03월	북단접속교, 북단연결로
	5 차	‘17.05월 / ‘18.09월	남단연결로, 남단접속교, 자전거경사로
강교 제작 및 가설	제 작	‘16.08월 ~ ‘19.05월
	가 설	‘17.04월 ~ ‘18.05월	수상구간
		‘18.06월 ~ ‘19.12월	육상구간

▢ 건설사업관리기술자(강교) 예정공정표

구 분		2016년				2017년				2018년				2019년				2020년				투입개월	비 고
감리사 (강교)	총 괄																					36개월
				2016.06.01.~2019.05.31
	8 차 분																					11개월	2016.06.01. 투입예정
				2016.06.01.~2017.05.01
감리사보 (강교)	총 괄																					36개월
						2017.01.01.~2019.12.31
	8 차 분																					4개월	2017.01.01. 투입예정
						2017.01.01.~2017.05.01

※ 강교제작 및 가설공사 공정에 따라 투입기간 조정예정

▢ 건설사업관리기술자(강교) 투입계획

구 분	투입등급	차 수	투입개월	투 입 기 간	비 고
건설사업관리기술자(강 교)	감 리 사	총 괄	36개월	2016.06.01.~2019.05.31	외주시행 예정
		8 차	11개월	2016.06.01.~2017.05.01
건설사업관리기술자 (강 교)	감리사보	총 괄	36개월	2017.01.01.~2019.12.31
		8 차	4 개월	2017.01.01.~2017.05.01

▢ 건설사업관리기술자(강교) 예산현황

단위 : 백만원

구 분	총 괄	2016년(8차분)	장 래	비 고
강교 감리비	1,044	221	823

▢ 검토의견

「월드컵대교 건설공사」중 시공사에서 제출한 강교제작 및 가설공사 예정공정     표를 검토한 결과 적정한 것으로 사료되며, 강교 건설사업관리기술자(감리      사,감리사보)를 적기에 투입하여 품질관리에 철저를 기하고자 하며, 당초 계     약된 투입계획 범위내에서 시행하는 것이 타당 할것으로 판단됨.

검토자 : 책임건설사업관리기술자  김  창  욱(인)