가. 현재 진행중인 공사 및 신규발주현황(동부도로사업소)

기관명 (부서명)	사 업 명	공사금액 (백만 원)	공사기간	착공일 (예정일)	준공예정일	공정률 (%)	비고
동부도로사업소 (기전과)	2020년 도로기전시설물 유지보수공사	190	2.28~12.31	‘20.2.28	‘20.12.31	79.5
동부도로사업소 (기전과)	2020년 위례터널 도로기전시설물 유지보수공사	60	3.5~12.25	‘20.3.5	‘20.12.25	57
동부도로사업소 (기전과)	2020년 경관조명 유지보수공사	90	2.26~12.28	‘20.2.26	‘20.12.28	50
동부도로사업소 (기전과)	동부 1구역 교통신호기 유지보수공사	720	2.17~12.28	‘20.2.17	‘20.12.28	62
동부도로사업소 (기전과)	동부 2구역 교통신호기 유지보수공사	720	2.20~12.28	‘20.2.20	‘20.12.28	70
동부도로사업소 (기전과)	횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사	720	2.26~12.28	‘20.2.26	‘20.12.28	61
동부도로사업소 (기전과)	안전표지 유지보수공사	93	2.28~12.28	‘20.2.28	‘20.12.28	60
동부도로사업소(도로보수과)	2020년 노후포장 도로정비공사(1구역)	1,531	‘20.3.31.~11.30.	‘20.4.6.	‘20.11.30.	50
동부도로사업소(도로보수과)	2020년 포장도로 노면표시 도색공사(1구역)	250	‘20.4.16.~11.30.	‘20.4.16.	‘20.11.30.	40
동부도로사업소(도로보수과)	2020년 노후포장도로정비공사(2구역)	1,882	‘20.4.20.~11.15.	‘20.4.22.	‘20.11.15.	40
동부도로사업소(도로보수과)	2020년 노후포장도로(2구역, 긴급) 노면표시 도색공사	353	‘20.4.20.~12.20.	‘20.4.29.	‘20.12.20.	30
동부도로사업소(도로보수과)	2020년 포장도로 긴급복구 정비공사(연간단가)	1,334	‘20.3.27.~12.20.	‘20.3.31.	‘20.12.20.	40
동부도로사업소(도로보수과)	2020년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)	3,488	‘20.3.20.~12.26.	‘20.3.24.	‘20.12.26.	40
동부도로사업소(도로보수과)	2020년 굴착복구 노면표시 도색공사(연간단가)	256	‘20.4.13.~12.26.	‘20.4.13.	‘20.12.26.	10
동부도로사업소(도로보수과)	2020년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)	1,131	‘20.4.20.~12.20.	‘20.4.23.	‘20.12.20.	30
동부도로사업소(도로보수과)	2020년 도로·교통 안전부속물 유지보수공사(연간단가)	355	‘20.3.19.~12.20.	‘20.3.20.	‘20.12.20.	50
동부도로사업소(도로보수과)	2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)	591	‘20.4.13.~12.26.	‘20.4.13.	‘20.12.26.	30
동부도로사업소 (시설보수과)	2020년 교량시설물(교량 및 고가차도) 일상유지보수공사	1,164	20.03.10~12.31.	20.03.13.	20.12.31.	15
동부도로사업소 (시설보수과)	2020년 도로시설물(터널,지하차도,복개도로) 일상유지보수공사	647	20.03.13~12.31.	20.03.13.	20.12.31.	30
동부도로사업소 (시설보수과)	성내유수지교 정비공사	761	착공일 ~12.31.	20.06.26.	20.12.31.	0