투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	건설폐기물 처리용역 설계변경(총차1회, 1차1회) 시행(경춘선)

우리 부에서 시행하는 『경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계) 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차1회,1차1회) 시행코자 합니다.

1. 용 역 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계) 건설폐기물 처리용역

2. 계약금액 : 272,491,900원 (1차 계약금액 : 250,000,000원)

3. 용역기간 : 2013. 12. 13 ~ 2015. 3. 7 (1차 2013. 12. 13.~2014. 12. 12)

4. 용 역 사 : ㈜대성에코 & 정일산업㈜

5. 예산과목 : 생활권 공원확충, 도심공원 확충, 경춘선 폐선부지 공원조성, 시설비 및

부대비, 시설비

6. 설계변경 내역

가. 기간 변경 : 없음

나. 금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
용역비(전체/총차)	272,491,900	298,800,000	증) 26,308,100
용역비(금회/1차)	250,000,000	298,800,000	증) 48,800,000

다. 설계변경 사유 : 붙임(관련방침) 참조

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차1회, 1차1회)  1부.  끝.

★주무관			공원시설과장			방재시설부장
협조자	계약2팀장
시행	방재시설부-9821	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서울특별시청 서소문별관 2동 2층)	/
전화	3708-8733	/전송	3708-8756	/	bethechange@seoul.go.kr	/	대시민공개