건설기술심의요청서

안건번호	제 호
구 분	용역발주심의

건 명	무단수 급수체계 구축사업 타당성 조사용역

요청기관명	상수도사업본부 급수부
제출년월일	2016년 1월 12일

기술용역사업계획

용역개요	○ 용 역 명 :「무단수 급수체계 구축사업」타당성조사 용역 ○ 용 역 비 : 536,260천원 ○ 용역기간 : 착수일로부터 8개월 ○ 사업규모 : - 상수도관망 최적화(블록시스템구축) ․ D=400~2,200㎜, L=135.8㎞ - 정수장, 지역 배수지간 공급체계구축 : D=600~2,200㎜, L=9.0㎞ - 주요관로 복선화 구축 : D=500~2,400㎜, L=23.0㎞ - 주요밸브 전동화 시범구축 : D=600~1,200㎜, 9개소
용역의 필요성	○ 최적의 상수도관망 정비를 통한 효율적 급수운영과 누수 등 돌발 사고에 대비한 지역 배수지간 비상관로 구축 및 주요관로 복선화 사업으로 365일 단수 없는 안정적인 급수체계 구축을 위한 종합 검토 및 검증 등 타당성에 대한 기술용역 필요
과업내용	○ 과업의 기본방향 - 최적의 상수도관망 정비를 통한 효율적 급수운영과 누수 등 돌발사고에 대비 지역 배수지간 연결관로 구축과 주요관로 복선화로 비상 상황에서도 단수없는 안정적인 급수체계 구축 ○ 과업의 범위 - 356일 단수없는 안정정적 급수체계 구축을 위한 타당성 조사 ○ 주요 과업내용 - 기본현황 조사 : 과업수행에 필요한 기본자료 및 현황 조사 - 타당성 조사 : 무단수 급수체계 구축을 위한 시설물 설치계획 - 경제성 조사 : 사업추진 타당성 평가 - 사업시행 계획 : 단계별 사업시행 방안 수립

용역의 시 행	○ 입찰방법 : 사업수행능력평가(PQ) 및 입찰가격을 통한 일반경쟁 입찰 ○ 결정사유 및 근거 - 사유 : 일반경쟁 입찰을 통하여 풍부한 경험과 전문기술 인력을 보유한 건설기술 용역회사로 하여금 타당성 조사시행 - 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제14조, 건설기술진흥법 제35조, 동법 시행령 제52조 및 동법 시행규칙 제28조, 행정자치부 예규 제2호(2014.12.19.)지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(제3장 기술용역 적격심사 세부기준)
사업추진 계 획	○ ’15. 09 : 기술용역 타당성 심사 의뢰 ○ ’16. 02 : 타당성 조사 용역 발주 ○ ’16. 11 : 지방재정투자사업 타당성조사 의뢰 (한국지방행정연구원) ○ ’17. 07 : 투자심사의뢰
상위 계획 및 관련용역 검토	○ 2030 서울특별시 수도정비기본계획
사업의 예상효과	○ 최적의 상수도관망 정비를 통하여 효율적인 급수운영으로 유수율 증대 효과와 지역 배수지간 비상관로 구축 및 주요관로 복선화 구축으로 대형 누수사고 등 비상시에도 365일 단수 없는 안정적인 급수체계 구축으로 시민 삶의 질 향상

【붙임 서류 】

1. 사업추진 계획서 1부.

2. 과업내용서 1부.  끝.