공  정  보  고

(난지물재생센터)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 하수슬러지 건조시설 설치공사

○ 사업규모 : 150톤/일(75톤/일×2계열, 함수율 80% ⇒ 10%)

○ 사업예산 : 10,296백만원(시설비 10,165, 감리비 131)

○ 시공업체 : 기계 - 대저건설(주) 조건연, 전기 - 우영전력(주) 신희교

- 도급금액 : 5,021백만원(기계 4,483, 전기 539)

- 관급자재 : 3,263백만원(건조기, 보일러, 수배전반, 자동제어반)

○ 사업기간 : 2013.7.3 ～ 2014.7.2

□ 추진현황

구 분	전월 실적( 2월)	금월 계획( 3월)	비 고
공정율	92.9%	98.5%	누 적 공정율
주 요 추 진 사 항	-주요자재 공장제작 수관식 보일러 및 부대설비 -주요자재 설치작업 슬러지 건조기 2대 슬러지 반입설비 슬러지 이송컨베이어 건조배가스 처리시설 슬러지 이송배관 등 -건축 내진보강 작업 등 건조기실 내부도장 전기실 벽체 -전기공사 수배전반, 자동제어반 설치 전력케이블 배선	-주요자재 반입설치 수관식 보일러 및 부대설비 -주요자재 설치작업 슬러지 반입설비 슬러지 이송컨베이어 건조배가스 처리시설 연소가스 세정시설 연소가스 연도 설치 탈취시설 슬러지 이송배관 등 -건축내진보강작업 탄소섬유 보강 내진보강재 철골 도장작업 -전기공사 전력케이블 배선

□ 문제점 및 대책

○ 예정공정에 따라 차질 없이 공사 진행 중