공  정  보  고

(난지물재생센터)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 하수슬러지 건조시설 설치공사

○ 사업규모 : 150톤/일(75톤/일×2계열, 함수율 80% ⇒ 10%)

○ 사업예산 : 10,296백만원(시설비 10,165, 감리비 131)

○ 시공업체 : 기계 - 대저건설(주) 조건연, 전기 - 우영전력(주) 신희교

- 도급금액 : 5,021백만원(기계 4,483, 전기 539)

- 관급자재 : 3,263백만원(건조기, 보일러, 수배전반, 자동제어반)

○ 사업기간 : 2013.7.3 ～ 2014.7.2

□ 추진현황

구 분	전월 실적( 4월)	금월 계획( 5월)	비 고
공정율	97.6%	99.5%	누 적 공정율
주 요 추 진 사 항	-무부하 시운전 2014.4.1.~ 시운전 대행 삼천리엔바이오 인력 : 8명 -주요내용 설비 점검 기기별 단독운전 제어설비 작동상태 연동운전 개선사항 보완 부하 시운전 준비 -건조기실 셔터 2조 설치 설계심사 사후평가 지적사항	-부하 시운전 시운전 대행 삼천리엔바이오 인력 : 8명 -주요내용 보일러 가동 건조기 가동 탈취시설 가동 세정시설 가동 저장시설 가동 제어설비 작동상태 확인 연동운전 점검 개선사항 보완 부하 시운전 준비 -저장조 진입로 정비

□ 문제점 및 대책

○ 예정공정에 따라 차질 없이 공사 진행 중