□ 추진상황(요약)

사업명	사업개요	추진실적
세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 사업	✜ 위치 : 중구 태평로1가 60-6외 5필지 ✜ 규모 : 지상1층/지하3층, 연면적 2,998.23㎡ ✜ 사업내용 : 광장, 문화 및 집회시설 (서울도시건축박물관) - 지 상 부 : 역사문화광장 조성(1,088㎡) - 지하공간 : 기존 덕수궁 지하보도와 연결하여 시민청․시청역과 연계한 특화공간으로 조성 (1,600㎡)	✜ 조성공사 착공(’16.10.26) - ’17. 10월 현재 터파기 및 흙막이 가시설 공사 중 ✜ 운영주체 및 용도 확정(’16. 6) - 운영주체 : 도시공간개선단 - 용 도 : 도시건축박물관 ✜ 성공회성당과 통합광장 조성 협약 체결(’17. 1) ✜ 전시콘텐츠 기획 및 세부운영계획 용역 시행 - 용역기간 : ’16. 12 ~ ’17. 11 ✜ 문화재 정밀발굴 조사(’16.4) 및 유구 발굴(’16.9) - 발굴 유구 : 수혈 1기, 적심 1기, 입사지정 2기

11-1		세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성

옛 국세청 별관 부지를 세종대로 일대의 역사문화적 특성을 대표하는 거점   시설로 활용하기 위해 역사문화광장과 시민소통공간으로 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 중구 태평로1가 60-6외 5

○ 사업규모 : 지상광장 1,088㎡, 도시건축박물관(지상1층/지하3층) 연면적 2,998㎡

○ 사 업 비 : 340억 원

○ 사업기간 : ’15. 1 ~ ’18. 6

□ 추진성과

○ 특화공간 조성공사 시행

- 공사 착공(’16. 26)

- 조성공사를 위한 사전 절차 이행

․시 투자심사(’16. 7) 및 도시계획시설 결정(’16. 8), 공유재산 관리계획(’16. 9)

․도시계획시설사업 실시계획인가고시(’16.10, 서고 제2016-333호)

○ 특화공간 활용방안 및 운영주체 확정

- 운영주체(도시공간개선단), 용도(서울도시건축 박물관) 확정(’16. 6)

○ 전시 컨텐츠 기획 및 세부운영계획 용역 시행

- 용역기간 : ’16. 12 ~ ’17. 11

○ 문화재 정밀발굴 조사(’16. 4) 및 유구 발굴완료(’16. 9)

- 발굴유구 : 수혈 1기, 적심 1기, 입사지정 2기

- 도시건축박물관 지하에 전시 예정

○ 통합광장 조성을 위한 성공회와의 협약 체결(’17. 1)

- 성공회성당 전면부지 포함 광장 조성하여 시민에게 개방

□ 향후 추진일정

○ ’17. 12. ~  : 전시설계 및 제작설치공사 시행

○   ~ ’18. 6. : 공사 완료

작 성 자	서북권사업과장 : 차창훈 ☎2133-1550 개발관리팀장 : 박해일 ☎1560 담당 : 박경숙․안대호 ☎1561