2016년 기능보강사업 계획변경 검토 (강서구-등촌9)

2016년 강서구 등촌7종합사회복지관 기능보강사업 공사 사업비 변경 요청이 있어 검토하고 그 결과를 보고드림

□ 변경요청

◯ 사업명 : 건물창호공사

◯ 변경사항

- 공사 내역 변경 없음, 최종 낙찰업체 견적 결과 총공사비 57% 감액

◌ 총사업비 : 13,233천원 → 5,687천원(7,546천원 감액)

※ 사업비 내역 (단위 : 천원)

변경전					변경후
사업내용	총사업비	시비	구비	자부담	사업내용	총사업비	시비	구비	자부담
건물 창호공사	13,233	8,800	3,771	662	건물 창호공사	5,687	3,810	1,592	285

◯ 변경사유

- 사업계획서 제출시 최초 견적의뢰 업체의 과다견적(시공비)으로 보조금 지원결정 이후 최종 낙찰업체의 견적 결과 사업비가 7,546천원 감액되었음

□ 검토결과 : “증액승인” - 서울시복지재단 보완 견적서 검토 완료

◯ 승인내역(단위 : 천원)

사업명	총사업비	시비	구비	자부담
건물창호공사	7,161	4,762	2,041	358

◯ 검토의견

- 변경내역(견적) 검토결과 현재 복지관에 설치된 창호의 형태보다 단열에 취약하고, 각층 창호 하부(내부면)유리가 노출되어 충격에 따른 안전사고 우려로 보완 필요

- 사업의 목적인 기존 창호대비 단열 성능이 높아지도록 고정창 부위에는 복층유리 한겹 추가 및 안전사고 예방을 위해 안전 방지대 설치하는 것이 적절

※ 일반적인 커튼월(연창) 설계시 내부측 하부에 내부 마감재 덧대거나 안전바 설치

- 시설측 요청을 통해 보완된 견적서를 근거로 변경요청 사업비 5,687천원에서 7,161천원으로 증액 승인