주식회사 수성엔지니어링

(우157-290) 서울시 강서구 외발산동 산71-11 TEL：032)673-1029  FAX：032)673-1030  담 당：이 태 주

문서번호 : 천호수 제2014 - 552호 시행일자 : 2014. 08. 26. 수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장 참 조 : 토목부장	선결				지시
	접수	일자 시간
					결 재 · 공 람
		번호
	처 리 과
	담 당 자

제    목 : 실정보고(기존 수로구간 퇴적지반 처리) 승인요청.

1. 오정 제2014-180호(2014.08.25)와 관련입니다.

2. 상기대호와 관련하여 「남부순환로~오정대로간 도로개설공사」 시행 중 기존 수로구간(STA.NO.0+220,390) 퇴적지반 처리에 대하여 붙임과 같이 실정보고 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙   임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 실정보고(기존 수로구간 퇴적지반 처리) 1부.  끝.

천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

책     임     감     리     원      정   하   설

검  토  의  견  서

검토건명

오정 제2014-180호(2014.08.25)

검 토 자

책임감리원 정 하 설

시 공 사

보훈종합건설(주)

공 사 명

남부순환로~오정대로간 도로개설공사

제     목

실정보고(기존 수로구간 퇴적지반 처리) 검토.

□. 검토개요

○ 남부순환로~오정대로간 도로개설공사를 시행함에 있어 기존 수로구간(STA.NO.0+220,390) 퇴적지반       의 처리에 대한 검토 사항임.

□. 검토내용

○ 실정보고 사유 및 공사비 비교 검토

- 실정보고 사유

: 본선 도로구간을 횡단하는 기존 수로구간(STA.NO.0+220,390) 퇴적지반(기존 수로바닥에 퇴적된          토사)을 처리하여 공사준공 후 발생될 수 있는 도로침하를 미리 예방코저 함.

공 종	규 격	단위	단가	공사비 검토
				①사토처리후 양질토사 되메우기			②운반암 성토후 양질토사 되메우기		③구입암 성토후 양질토사 되메우기
				수량	금액		수량	금액	수량	금액
사토처리	퇴적토	M3	13,785	514		7,085,490
순쌓기	퇴적지반	M3	4,515	571		2,578,065
순쌓기	누락분	M3	4,515	1,428		6,446,417	971	4,384,065	971	4,384,065
되메우기 및 다짐	기계100%	M3	4,906	1,799		8,825,894	1,799	8,825,894	1,799	8,825,894
물푸기	기존수로	HR	13,897	15		208,455	15	208,455	15	208,455
사석운반	L=38.7km 구리암사연결도로	TON	12,274			-	1,089	13,366,386
사석	0.01~0.03㎥	TON	9,275			-		-	1,089	10,100,475
직공비		식				25,144,321		26,784,800		23,518,889
간접비		식				11,255,679		12,015,200		10,171,111
도급비						36,400,000		38,800,000		33,690,000
검 토									(현장안)

- 퇴적지반 처리 공사비 비교                                                      (단위:원)

□. 현황도면

○ 평면도(기존 수로1,2 현황)

○ 수량변경 검토

구 분		규 격	단위	당초	변경	증.△감	비고
1.토공	순쌓기	토사	M3	-	971	971
	되메우기 및 다짐	기계100%	M3	-	1,799	1,799
	물푸기	기존수로	HR	-	15	15
	사석	0.01~0.03㎥	TON	-	1,089	1,089

○ 공사비 변경 현황                                                           (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증·△감	비 고
1.토공
-기존수로 퇴적지반 처리	-
순쌓기	-	4,384	4,384
되메우기 및 다짐	-	8,826	8,826
물푸기	-	209	209
사석	-	10,100	10,100
직접공사비	-	23,519	23,519
간접공사비	-	10,171	10,171	부가세포함
도 급 액	-	33,690	33,690
관급자재대	-	-	-
총 공사비	-	33,690	33,690

○ 주요 도면

- 기존 수로1(STA.NO.0+220)

A-A'단면	B-B'단면
C-C'단면

- 기존 수로2(STA.NO.0+390)

A-A'단면	B-B'단면
C-C'단면

○ 단가적용 검토

- 지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅵ.공사설계의 변경.1-가-2)항. "지질,용수등 공사현장의 상태가          설계서와 다른 경우" 및 Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항의 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에       해당되는 설계변경으로 계약 당사자간에 협의가 이루어지지 않아 설계변경 당시를 기준으로 하여         산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 신규비목에 대하여           강제협의율(92.75%)로 요청한 사항임.

※강제협의율(92.75%)=[설계율(100%)+낙찰율(85.515%)] × (50/100)

□. 검토의견

○ 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 중 기존 수로구간(STA.NO.0+220,390) 퇴적지반(기존 수로바닥      에 퇴적된 퇴적토)의 처리에 대하여 기술지원감리원 검토(기존 수로구간의 불량지반 처리를 위해         사석투하에 의한 강제 치환공법은 지지력 및 침하문제를 해결할 수 있을 것으로 판단됨) 및 상기표(퇴      적지반 처리 공사비 비교)에서 검토결과, 공사비가 가장 적게 소요되는 구입암 성토후 양질토사로 되      메우기 하는 것이 가장 적정하다고 판단되며,

○ 설계변경으로 인한 계약금액의 조정 중 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에 해당되는 설계      변경으로 계약 당사자간에 협의가 이루어지지 않아 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동      단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 신규비목에 대하여 강제협의율(92.75%)을       적용함.

○ 신규비목 추가사항 등을 검토한 결과, 원활한 공사추진을  위하여 실정보고 세부사항은 적정하다고        판단되며, 실정보고 승인 후 설계 심의결과에 따라 추후  설계변경에 반영하는 것이 바람직할 것으로      판단됨.

붙   임 : 1.지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅵ.공사설계의 변경, Ⅶ.계약금액의 조정 사본 각 1부.

2.협조전 23-14-협조-188호(2014.08.22) 사본 1부.  끝.

검  토  자

천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

책    임    감    리    원    정  하  설   (인)