검 토 의 견 서
검토건명	관급자재 구매 변경 건	검 토 자	감리원 이 승 노
시 공 사	보훈종합건설(주)
공 사 명	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
제 목	관급자재(이형철근) 구매 변경 검토
□. 검토내용 ○ 현 황 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 중 관급자재 이형철근의 분할납품요구 및 통지를 확인한 결과 인도조건이 하치장 상차도로 되어야 하나 생산공장 상차도로 되어 있어 인도조건 변경요구에 대한 시공사의 요청 사항임. ○ 문제점 인도조건 상이로 인하여 시공사에서 비용부담이 발생 됨. ○ 대 책 시공사의 요구대로 관급자재 인도조건을 변경하여 재 구매하는 건이 타당하다고 사료 됨.