노량진로 보행환경 개선

	< 요 청 내 용 >
노량진역 맞은편 노점 이용객 증가로 시민통행이 불편하여, 노점을보도폭이 넓은 곳으로 이전을 추진하고 있으나, 이에 따른 지장물 제거와 보도정비에 시특별교부금 예산지원이 절실함

□ 사업개요

○ 위    치 : 노량진로 146~196

○ 사업규모 : B=5~8m, L=450m

○ 사업내용 : 보도 및 도로시설물 정비, 지장물(한전분전함) 이설 등

- 보도정비 : 50m×6m, - 한전분전함 이설 : 3개소, - 도로시설물 정비 : 안전휀스, 볼라드 등

○ 소요예산 : 500백만원(서울시 특별교부금)

○ 사업기간 : 2015. 5. ~ 8월

○ 현    황

□ 추진경과 및 상황

○ 2015.  2. 23. : 노량진로 노점정비 세부추진계획 수립

- 노량진역 앞 보도육교철거 교통규제심의(보류 : 노점정리 필요)

○ 2015.  2. 12. : 노점문제 관련 주민 등 설문조사

○ 2015.  3. 19. : 노점주 대상 공청회 실시

○ 2015.  4. 24. : 노점 이전 관련 검토회의(부구청장 집무실)

○ 2015.  5. 11. : 노점단체와 노점 이전 합의

- 노점단체(전노련, 민노련)측과 20여차례 간담회 및 이전의 당위성 설명

○ 2015.  5. 14. : 노점관리 개선 전략회의 개최(구청장실)

□ 검토의견

○ 노량진역 주변 노점으로 인한 시민통행 불편 등을 해소하기 위하여         현위치의 노점을 인근지역으로 이전하고 보도 및 도로시설물 등을 정비       하고자 하는 사업으로서

○ 내․외국인에 대한 서울의 이미지 제고에 기여할 것으로 판단되며, 사업의       타당성이 인정됨.