검 토 의 견 서
공 사 명	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
제 목	목재데크(계단부) 시공법 변경	보고일자	2018. 03
건 명	실 정 보 고	작 성 자	이 철 우
관련문서	중랑천 제2018-51(2018.03.26.)호	확 인 자	오 세 영

□ 검 토 목 적

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사」관련 계단부의 목재데크를 원설계 적용하여 시공할 경우 배수지연으로 인한 목재데크, 계단강판에 내구성 저하와 겨울철 이용자의 안전사고 위험이 있어 이를 방지하고자 실정보고 함.

□ 추 진 경 위

□ 대콘(초안산)제18-38호(2018.02.08) [건설사업관리단 ￫ 기술지원기술자]

- 계단부 목재데크 당초 설계에 대한 검토안(물고임 방지를 위한 지지용

파이프 설치) 검토요청

□ 대한(감본)제1-26호(2018.02.09) [기술지원기술자 ￫ 건설사업관리단]

- 검토의견서 송부(적절하다고 판단됨)

□ 원설계사 검토의견 (2018.03.23) [원설계사 ￫ 건설사업관리단]

- 배수를 위해 적정하다고 판단됨.

□ 원설계 현황

▣ 평 면 도

목재데크(계단) 설치위치

▣ 상세도

계단부 목재데크 설치계획 상세도(당초설계)

□ 검 토 내 용

1. 문 제 점

- 계단부 목재데크의 실시설계는 계단(steel plate 6t)상부에 목재(이페/오일스테인)를 나사로 고정하는 방법을 적용하여,

- 우기시 목재데크와 하부 계단 강판사이의 물고임 현상과 나사 체결 천공부위로 물이 유입되어 강판의 부식과 목재데크의 내구성 저하의 문제점,

- 동절기 배수불량으로 인한 결빙으로 이용객의 안전사고(미끄러짐)발생우려가 있어 이를 개선하고자 함.

2. 검 토 안

당 초	변 경 (교량슬래브 목재테크와 동일공법 적용)
면적 : A=280㎡	면적 : A=280㎡
장점 : 공사비 저렴, 시공 간편 단점 : - 배수 불량으로 강판 부식 및 목재데크 내구성 저하 - 동절기 결빙시 이용객 안전사고 발생 우려 도급단가 : 246,430원	장점 : 하자발생차단 - 계단 강판 및 목재데크 부식 방지 - 배수처리 양호하여 동절기 결빙으로 인한 안전사고 방지 단점 : 공사비 고가[AL PIPE 설치 및 용접] 도급단가 : 317,040원[교량부 단가 적용]
※교량부 시공법과 동일한 AL PIPE 접합 설치 후 데크 설치

□공사비 증·감 현황

(단위:천원)
구 분	규 격	단위	당 초			변 경			(증.감)	비 고
			수 량	단 가	금 액	수 량	단 가	금 액
목재데크	교량부	㎡	764	317	242,218	764	317	242,218	-
	계단부	㎡	280	246	69,000	280	317	88,771	19,771
제 경 비			-		109,532			115,149	5,617
공 사 비			-		420,750			446,138	25,388

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	(증 . 감)
도 급 액	420,750,000	446,138,000	25,388,000
관 급 자 재 비	-	-	-
공 사 비 계	420,750,000	446,138,000	25,388,000

□ 검토결과

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사의 계단부 목재데크 시공방법은 계단하부 강판(steel plate 6t) 상부에 목재데크(이페/오일스테인)를 고정용 나사를 이용하여 고정시키는 방법으로 설계됨.

- 원설계 적용 시공시 강우로 목재데크 하부로 스며든 물의 배수가 안되어 장시간 물고임으로 목재데크가 부식되어 내구성이 저하되고, 나사 체결 천공부위로 물이 유입되어 강판 부식이 발생하며,

- 동절기 계단부 배수불량으로 인한 결빙으로 목재데크의 파손과 이용객의 미끄러짐으로 인한 안전사고 위험이 있음.

- 이를 예방하기 위해 계단부 목재데크도 교량상판의 목재데크와 동일한 AL PIPE 지지대와 ㄱ형 앵글을 용접하여 고정하는 방법으로 변경 시공시 물고임 방지로 계단강판과 목재데크의 내구성 저하를 방지 할 수 있으며, 배수가 원활하여 동절기 결빙으로 인한 이용객의 사고를 사전에 방지 할 수 있다고 사료되며,

- 단가는 기존 교량상부의 목재데크 설치 단가를 적용함이 적정하다고 판단됨.   끝.

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

책임건설사업관리기술자  오  세  영