서울거리 예술센터 조성공사(전기,소방)제3회 설계변경내역 검토의견서

문서 번호

자람감리20150324

수    신

서울특별시 도시기반시설본부

공  사 명

서울거리 예술센터

조성전기공사

공    종

■전기

구     분

□ 자체 제시 의견사항      □ 사업주체 검토 요구사항        ■ 시공자 제출사항

제     목

전기공사,  설계변경내역 검토.

검 토 의 견 서

1. 공 사 명 : 서울거리 예술센터 조성 전기공사

2. 검토목적 : 제3회 설계변경 타당성 검토.

3. 관련근거 : 스마트전력2015-0324

4. 검    토

가. 일반현황사항

1) 도 급 자 : 스마트전력 주식회사 대표자 김재만

2) 계약금액 : ￦451,297,000원(VAT 포함)

3) 변경내역금액: ￦461,812,000원(VAT 포함)

4) 증감금액:(증)￦10,515,000원(VAT 포함)

3) 계 약 일 : 2014.10.06

4) 착 공 일 : 2014.10.13.

5) 준공예정일 : 2015.03.31.

나. 설계변경 내용

공정	금액(순공사비)		증감	비고
	변경전	변경후
1-11.광진구청전광판전원공사	0	1,006,768	증1,006,768	광진구청전광판전원신설
2-1전력간선공사	0	1,341,821	증1,341,821	2동연습실간선추가
2-4.전등설비공사	0	4,902,418	증4,902,418	2동연습실전등추가
2-5.전등전열공사	0	2,928,034	증2,928,034	2동연습실전열추가
2-7.냉난방설비공사	0	1,064,516	증1,064,516	2동연습실냉난방추가
1-5.전등설비공사	0	4,200,270	증4,200,270	1동변경에따른추가
1-6.전열설비공사	0	688,581	증688,581	1동화장실비데콘추가
1-8.소방설비공사	0	370,300	증370,300	1동비상조명등추가
2-1.수변전설비공사	8,185,320	0	감8,185,320	비상발전기2일-0일
계	8,185,320원	16,502,708원	증)8,317,388원	순공사비

다. 설계변경 금액

구분	금액		증감	비고
	변경전	변경후
계약금액	451,297,000원	461,812,000원	증)10,515,000원	제경비,VAT 포함

5. 결   론

상기 검토한 바와 같이 전기공사 설계변경 내역이 적정하다고 사료됨.  끝.

상기와 같이 설계변경 검토의견서를 제출합니다.

2015 년  03 월 24 일

(주)자람앤수엔지니어링

전기책임감리원     진 동 종  (인)