(주)도화엔지니어링 (주)트레픽스	감 리 검 토 의 견 서	2015. 05.
공 사 명	구리암사대교연결도로건설공사	작성자	곽경표
검 토 건 명	교통신호기공사 추가 설치 검토보고

1.검토목적

○ 연결도로공사 본선 2구간(정수장사거리~훈련원사거리)의 경찰청 교통안전시설  변경 심의결과에 따른 교통신호기공사 추가 설치에 대한 적정성 검토.

2.관련근거

☐ 경찰청 교통관리과-7298(2015.03.23) : 교통안전시설 변경(추가)개선 설치 통보[구리암사대    교 연결도로 건설공사 1,2구역]

[ • 신호등설치 2곳, 위치조정 1곳 : 금회보고

• 최고속도제한 노면표시 2곳, 어린이보호구역(통합표지) 1곳, 교량통합표지 1곳       : 수량정산 ]

3. 위치도

내용	수량			비 고
	당초	변경	증,감
제어기 부분품	-	2EA	증)2EA	공사중 교통처리계획에 대한 변경 규제심의에 따른 반영
소형고압블럭 굴착배관	-	12m	증)12m
전선관 PE 100mm 1열 지중	-	12m	증)12m
차량등 LED 1면4색	-	2조	증)2조
차량신호등 이설 LED 1면3,4색	-	2조	증)2조
보행신호등, 잔여표시기(1면2색)	-	2조	증)2조
보행신호등,잔여 표시기이설 (1면2색)	-	1조	증)1조
디자인차량신호등주 (단방향)Φ250×8.5	-	1본	증)1본
디자인 지주부착대 9M	-	1본	증)1본

4. 검 토 내 용

5. 전체공사비 증감 검토

공 종	공사비 현황(단위:원)			비 고
	당 초	변 경	증⋅감
1. 직접공사비		23,075,187	증) 23,075,187
2. 제 경 비		8,167,216	증) 8,167,216
이 전 비		121,234	증) 121,234
공 급 가 액		31,363,637	증) 31,363,637
부가가치세		3,136,363	증) 3,136,363
도급공사비		34,500,000	증) 34,500,000

6. 검 토 결 과

○ 상기 검토내용과 같이, 구리암사대교 연결도로 건설공사에 따른 신호등 설치공사에 대하여     교통신호기 공사중 교통처리계획도에 의한 변경 규제심의결과 및 설계물량 정산, 관할      사업소 협의된 내용을 반영하는 것으로 공사물량은 적정한 것으로 판단되며

○ 신호등 이설 및 추가 설치에 따른 공사비 산정은 설비부에서 “교통신호등 설치” 설계변      경자문회의 실시(‘15.4.20)결과 확정된 단가를 기준으로 작성되었으며, 이를 적용함이 타      당할 것으로 판단됩니다.

붙임 : 1.정수장사거리 ~ 훈련원사거리 교통처리계획 도면

2. 관련공문 경찰청 교통관리과-7298(2015.03.23)

3. 시공사관련공문 사본 1부 끝

암사대교건설공사 외1건

통합전면책임감리용역

책임감리원 우재경