검  토  의  견  서

검토건명

오정 제2015- 108호(2015.05.19)

검 토 자

책임감리원 정 하 설

시 공 사

보훈종합건설(주)

공 사 명

남부순환로~오정대로간 도로개설공사

제     목

실정보고(쏘일네일링 인발시험) 검토.

□. 검토개요

○ 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 중 비탈면 보강공사의 쏘일네일링 인발시험 시험비

반영 실정보고에 대한 검토 사항임.

□. 검토내용

○ 현    황

- 흙깍기 비탈면 보강을 위한 쏘일네일링(272공) 시공에 대한 인발시험이 누락됨

- 흙깍기 비탈면 보강을 위한 쏘일네일링 품질확보를 위한 인발시험이 시방서에는 명기되어

있으나 도면 및 산출내역서에 미반영되어 설계도서 상호간에 모순이 발생됨

○ 대    책

- 시공된 쏘일네일링의 그라우팅 양생이 완료되면 인발시험을 실시하여 품질관리를 하고자함

시험방법은 프루프시험을 적용 실시

○ 관련근거

- 공사시방서 4-7-4 흙비탈면 보강공(3.5인발시험)

- 프르프시험 : 시험기준 50공당 1회

○ 현황도면

○수량변경 검토

구 분	규 격	단위	당초	변경	증.△감	비고
6. 부대공
6-9 품질시험비
프루프시험	쏘일네일링	회	-	6	6

○ 공사비 변경 현황                                                         (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
6. 부 대 공
직 접 공 사 비	-	2,726,850	2,726,850
간 접 공 사 비	-	454,968	454,968
공 급 가 액	-	3,181,818	3,181,818
부 가 가 치 세	-	318,182	318,182
도 급 액	-	3,500,000	3,500,000
관 급 자 재 비	-	-	-
총 공 사 비	-	3,500,000	3,500,000

○ 단가적용 검토

- 견적단가 적용

- 신규단가:

지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항의 "계약상대자의 책임없는 사유로

인한 경우"에  해당 되는 설계변경으로 계약 당사자간에 협의가 이루어지지 않아 설계변경 당시를

기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 신규

비목에 대하여 강제협의율(92.75%)로 요청한 사항임.

※강제협의율(92.75%) = [설계율(100%)+낙찰율(85.515%)] × (50/100)

□. 검토의견

○ 흙깍기 비탈면 보강을 위한 쏘일네일링 시공시 품질확보를 위해 인발시험을 실시하고 누락된 수량은

반영하는 것이 타당하다고 판단되며

○ 설계변경으로 인한 계약금액의 조정 중 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에 해당되는

설계변경으로 계약 당사자간에 협의가 이루어지지 않아 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한

단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 신규비목에 대하여

강제협의율(92.75%)을 적용함.

붙   임 : 1.시공사 공문 사본 1부.  끝.

검  토  자

천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

책    임    감    리    원    정  하  설   (인)