검 토 의 견 서

○ 검토건명 : 시점부 응봉삼거리 교차로개선공사(토목) 실정보고

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선공사

1. 실정보고 사유

- 서울성동경찰서 이첩 민원사항으로 시점부 응봉삼거리 교차로에 대하여 금호동에서 행당동 한신아파트 방향으로 직진할 수 없어 응봉교 하부로 우회하는 불편사항이 있어 성동경찰서에 집단 민원이 야기되고 있는 바, 교통안전시설을 개선하여 교통소통 원활과 교통사고를 사전에 방지하고 교통 불편을 해소함으로써 주민만족도 향상을 도모코자 실정보고 함.

- 관련 문서 : SMIH-14-22928(`14.04.14.) 업무연락전[교통안전시설 개선설치 업무지시], 성동경찰서 교통과-2855(`14.04.11.) 교통안전시설 개선 설치 요청(응봉삼거리, 성동서)

2. 검토내용

- 시점부 응봉삼거리 주변 교통 현황

- 응봉삼거리 교차로 교통처리계획도

- 서울성동경찰서 현장조사보고서 검토 내용

· 요청 시설물 : 신호기 이설(차/보), 신호등 교체(3색→4색), 정지선 이설(전방 5m), 노면표시 개선 및 교통섬 축소 등

· 요청 사유 : 응봉교차로는 왕복8차로 도로로서, 강북↔강남방향 성수대교 등을 이용하는 차량들이 많아 출퇴근 시간대는 혼잡한 지점으로 금호동에서 왕십리역 방향 좌회전 시 행당한신아파트 방향 직진이 금지되어 우회 불편 등 법규 위반에 따른 개선 요청 민원이 지속적으로 접수되는 곳으로 금호동에서 왕십리역 방향 좌회전 시는 시인성 확보(교통섬 축소, 신호기 이설) 후 직진 신호를 부여하여도 횡단보도 신호에 따른 신호 손실이 없으며, 그 외 정지선 이설 등으로 통행 차량들의 불편을 해소하여 원활하고 안전한 통행을 유도하고자 함

· 성동경찰서 의견 : 개선이 필요한 지점으로 승인

- 응봉삼거리 교차로 개선공사 주요내용

노면표시	교통안전표지
- 정지선 위치 조정(5m) - 노면표시 개선	- 교통안전표지 이설(3EA)
교통섬 축소	공사중 소통대책
- 경계석 철거 및 재설치 - 보도블럭 철거 및 재설치, 아스콘 포장	- 기존 횡단보도 반폭시공, 안전시설물설치 - 교통신호수 및 보도안전도우미 배치

- 주요 수량 증·감 현황

공 종	단 위	수 량		증·감	비 고
		당 초	변 경
응봉삼거리 교차로개선공사 (토목공사,노면표시,안전표시)	식	-	1.0	증) 1.0

- 단가 적용 현황

· 산출단가(표준품셈, 견적 등)  : 협의율 적용[(69.747+100)/2=84.874%]

※ 실적공사비 단가 : 최저가 현장으로 100% 적용

※ 증가 물량 및 신규비목 단가에 대하여 공사계약일반조건 제20조 2항에 의거 계약상대자의 책임없는 사유로 협의율 적용함이 타당하다 사료됨.(민원사항으로 발주처 지시에 의한 신규 추가공사)

- 공사비 증․감 현황                                          (단위 : 천원,VAT포함)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
도급비	교차로 개선공사 (부대토목)	-	16,477	16,477
	교차로 개선공사 (노면표지)	-	2,082	2,082
	제요율적용제외공종 (설계비 외)	-	7,698	7,698
	소 계	-	26,257	(증) 26,257

3. 검토의견

- 상기 검토내용과 같이 시점부 응봉삼거리 교차로 개선공사에 대하여 서울성동경찰서 현장조사보고서 검토 내용과 같이 금호동에서 행당한신아파트 방향 직진이 금지되어 우회 불편 등 법규 위반에 따른 개선 요청 민원이 지속적으로 발생되는 바, 교차로 교통안전시설을 개선하여 교통소통 원활과 교통사고를 사전에 방지하고 이용 주민의 불편이 없도록 조치함이 타당하다 사료됩니다.

2014.  10.

검토자  책임감리원(업무대행)  김 성 기