검 토 의 견 서

○ 검토건명 : 설계변경(전체10회, 9차1회)

○ 용 역 명 : 용비교-행당중간 도로개설공사

1. 검토목적

-.용비교-행당중간 도로개설공사와 관련하여 토목부 방침 결과에 따라 설계변경 요청이 있어 이를 검토하여 원활한 공사추진에 목적이 있음.

2. 검토내용

1)관련법규

-.공사계약일반조건 제19조(설계변경 등)

2)공사개요

-.연    장 : L=718.39m

-.폭    원 : B=19.5~26.4m

-.교    량 : L=519.778m, B=26.4m(6차로확장)

-.토공도로 : L=198.612m, B=19.5m(5∼6차로 확장)

-.교 차 로 : 1개소(평면교차로)

-.중랑천 오염토 정화공사 1식, 부대공사 1식

3)9차공사 예산현황

금액단위:백만원

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
도 급 비	2,410	2,208	-202
감 리 비	350	350	-
이 전 비	20	-	-20
관급자재	99	151	52
폐기물처리비	21	21	-
전기공사비	100	270	170
합 계	3,000	3,000	0

4)관련근거(실정보고)

금액단위:천원

구 분	당 초			변 경			증 감			관련문서
	도급	관급	폐기물	도급	관급	폐기물	도급	관급	폐기물
①교각8 자전거도로 이설	-	-	-	21,659	1,834	1,738	21,659	1,834	1,738	도시기반시설본부-15-161 (2015.03.30)
②기존교량 포장	-	-	-	1,181,950	-	53,845	1,181,950	-	53,845	도시기반시설본부-15-2166 (2015.04.17)
③교통정보시스템 케이블이설 및 복구공사	-	-	-	99,000	-	-	99,000	-	-	설비부-6158 (2015.05.25)
④보차도 차량방호책 변경	451,759	-	-	401,951	-	-	-49,808	-	-	도시기반시설본부-15-3236 (2015.06.15)
⑤투석방지용 휀스 변경	39,600	-	-	57,156	-	-	17,556	-	-	도시기반시설본부-15-3228 (2015.06.15)
⑥보도부 포장방법 변경	152,955	-	-	455,180	-	-	302,225	-	-	도시기반시설본부-15-3757 (2015.07.15)
⑦가시설계측 정산	79,299	-	-	73,898	-	-	-5,401	-	-	도시기반시설본부-15-5126 (2015.09.24)
⑧신축이음장치 변경	1,143,505	-	-	1,190,178	-	-	46,673	-	-	도시기반시설본부-15-5717 (2015.10.13)
합 계	1,867,118	0	0	3,480,972	1,834	55,583	1,613,854	1,834	55,583

5)설계변경 내용

가)공사비 변경

금액단위:백만원

구 분		전 체			9차공사			비고
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
도급	공급가액	23,977	25,444	1,467	2,191	2,007	-184
	부가세	2,397	2,544	147	219	201	-18
	소계	26,374	27,988	1,614	2,410	2,208	-202
관급자재		1,280	1,278	-2	99	151	52
총 계		27,654	29,266	1,612	2,509	2,359	-150

나)공사기간

구 분	당 초		변 경		비고
	착공일	준공일	착공일	준공일
전 체	2007.03.22	2015.12.31	2007.03.22	2015.12.31	변경없음
9차공사	2015.03.01	2015.12.31	2015.03.01	2015.12.31	변경없음

다)공종별 변경 내용

금액단위:백만원

공 종	전 체			9차공사			비고
	당초	변경	증감	당초	변경	증감
1.공통공사	118	118	-	-	-	-
2.토 공	798	798	-	-	-	-
3.배수 및 옹벽공사	317	317	-	-	-	-
4.구조물공사	11,634	11,643	9	1,654	1,592	-62
5.포장공	225	1,413	1,188	172	82	-90
6.부대공	1,486	1,582	96	10	14	4
7.오염토정화공사	2,597	2,597	-	-	-	-
8.교통안전시설공	136	136	-	-	-	-
제 잡 비	2,188	2,349	160	201	187	-14
제요율적용제외공종	882	889	8	-	-	-
오염토정화처리	2,929	2,929	-	-	-	-
물가변동액	667	673	6	154	132	-22
공 급 가 액	23,977	25,444	1,467	2,191	2,007	-184
부가가치세	2,397	2,544	147	219	201	-18
도 급 액	26,374	27,988	1,614	2,410	2,208	-202

3.검토결론

-.설계변경 내용에 대한 검토결과 토목부 방침 결과에 의거 공사비 변경은 적정하게 반영된 것으로 판단되며, 폐기물처리비는 폐기물처리용역 설계변경에 최종 반영 하겠습니다.

붙  임 : 설계변경사유서 1부.  끝.

2015. 10.

검토자  책임감리원  장 현 종