검 토 의 견 서

□ 검토목적

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 중 9차분 계약에 의한 품질관리계획서 개정(6차) 및 품질시험계획서(12차) 적정성 검토

□ 검토기준

○ 건설기술관리법 제24조 및 동법 시행령 제41조, 제42조, 제43조

○ 책임감리현장 참여자업무지침서 제28조, 제29조, 제30조

□ 개정요약

개 정 항 목	개정일자	개정차수	개 정 사 유
품질관리계획서 - 제1장 건설공사 정보 - 제2장 품질방침 및 품질목표	2014.03.17	6	∙ 작성, 승인, 검토자 변경 ∙ 실정보고 외 2건에 따른 총 공사금액 변경 ∙ 9차분 계약에 따른 공사기간 변경 ∙ 2014년 품질방침 및 목표 변경
제16장 중점 품질관리	2014.03.17	3	∙ 총 공사금액 및 작성, 승인, 검토자 변경 ∙ 9차분 계약에 따른 공사기간 변경
제20장 검사 및 시험, 모니터링	2014.03.17	12	∙ 9차분 계약에 의한 품질시험계획서 변경

□ 품질관리계획서 검토내용

점검항목 및 점검사항	개정사항 검토		검토 결과	비고
	당초	변경
표지 및 Quality Plan	◎ 작성, 검토, 승인 - 현장대리인 장윤석 품질담당 허 섬 박상용 공무담당 진동수	◎ 작성, 검토, 승인 - 현장대리인 최영근 품질담당 유영준 박우진 공무담당 장준기	적정
제1장 건설공사 정보	1. 공사개요 - 공사금액 ; 305,516백만원 - 공사기간 ; 2009. 2. 13 ~ 2014. 1. 18	1. 공사개요 - 공사금액 ; 305,921백만원 - 공사기간 ; 2009. 2. 13 ~ 2015. 2. 28	적정
제2장 품질방침 및 품질목표	1. 회사 품질방침 - 품질․안전보건․환경방침 2. 현장 품질방침 - 현장대리인 장윤석 3. 현장 품질목표 - 현장대리인 장윤석	1. 회사 품질방침 - 품질방침 2. 현장 품질방침 - 현장대리인 최영근 3. 현장 품질목표 - 현장대리인 최영근	적정
제16장 중점품질관리	○ 공사금액 및 공사기간, 작성, 승인, 검토자 퇴사에 따른 변경		적정	별도관리
제20장 검사 및 시험 모니터링	○ 9차분 계약에 따른 품질시험계획 작성		적정	별도관리

□ 품질시험계획 검토내용

○ 품질시험계획     : 적정

○ 시험장비 현황    : 변경 없음

○ 시험실 면적 현황 : 변경 없음

○ 시험인력 현황    : 품질관리자 선임 변경(선임계 제출 및 승인 득)

□ 검토결과

○ 건설기술관리법 제24조 및 동법시행령 제42조 등 관련규정에 적정하게 품질관리계획 수립