(주)도화엔지니어링 (주)제일종합건축사사무소	감 리 검 토 의 견 서	2014. 07.
사 업 명	구리암사대교 연결도로 건설공사	검토자	김윤호
검 토 건 명	본선 종단계획고 조정에 따른 보강토 옹벽 검토

1. 검토목적

○ 선사로∼고덕지구간 도로확포장공사구간에서 지장 상수도관로 보호를 위하여 본 공사구간의 도로 종단 계획고를 조정함에 따라 당초 계획된 보강토 옹벽 규모와 절·성토 토공수량이 변동되는 것으로 나타나, 공사의 시급성을 감안하여 우선 시공코자하는 시공사의 실정보고 사항에 대하여 검토하여 보고함.

- 관련근거 신성암사 제2014-215[2014.06.19.]

2. 종단계획고 조정에 따른 변경 현황

암사정수장

암사대교

정수장사거리

서원마을

변경 계획고

당초 계획고

sta. 1+740

sta. 2+180

당초 : 토공사면

변경 : 보강토옹벽(262m)

PRN옹벽(2구간)

당초 : 152m(622㎡)

변경 : 43m (181㎡)

PRN옹벽(1구간)

당초 : 175m(1,098㎡)

변경 : 175m(1,100㎡)

2. 추진현황

○ 위치 : 본선 STA. 1+620∼2+180(L= 560m)

○ 추진경위

- 선사로∼고덕지구간 도로확포장공사구간에 상수관로가 저촉되어 당초 이설            예정인 상수관로 토피를 확보하는 방안으로 계획 변경됨에 따라 본 공사              구간을 포함하여 종단계획고 변경 설계를 하였음.

- 선사로에서 시행한 설계도서를 검토한바 계획고가 높아짐으로 인해, 당초 시공예정인 PRN 옹벽이 일부구간에서 규모가 변경되고, 용지확보를 위해 성토사면 우측에 보강토 옹벽을 추가 설치하는 것으로 설계되어있어 공사기간 추가가 불가피한 것으로 판단됨.

* 별첨 예정공정표 참조

3. 변경내용

○ 공사 개요

위 치	공 종		공사규모		개략공사비(백만원)
			당 초	변 경	당 초	변 경	증,감
STA. 1+620 ∼ 2+180	PRN 옹벽	1구간	H=3.7m,L=175m A=1,098㎡	H=5.3m, =175m A=1,100㎡	621	630	9
		2구간	H=9.3m,L=152m A=622㎡	H=5.1m,L=43m A=181㎡	350	103	-247
	보강토옹벽		-	H=5.3m,L=262m A=1,101㎡	-	434	434
	토공	절토	43,100㎥	27,700㎥	276	265	-11
		성토	47,500㎥	71,700㎥	49	72	23
		-	유용토 4,400㎥	사토 44,000㎥	-	-1,071	-1,071
합 계					1,296	433	-863

※ PRN 옹벽 1구간 : 설계지반고와 현 지반고 차이발생 (H=40.56m,  H=43.21m)

PRN 옹벽 2구간 : 계획고 변경 (2단옹벽 → 1단옹벽)

보강토옹벽 신설구간 : 계획고 변경으로 부지확보 위한 옹벽 신설

4. 기술지원감리원 보강토 옹벽 구조검토 결과

○ 블록식옹벽 및 PRN옹벽에 대한 설계는 경제적이고 안정적으로 적정하게 검토        된 것으로 판단됨.

○ 블록식보강토옹벽 및 PRN옹벽기초지반에 대해서는 충분한 수량의 평판재하시험을        실시하여 소요지지력 확보 여부를 정밀 검토하여야함.

○ PRN옹벽구간중 옹벽배면부에 약품저장탱크가 위치하는 구간에 대해서는 옹벽          시공중, 시공후 적정기간 약품탱크의 변형(침하 및 측방이동)량에 대해 정밀계측을        실시하여 과다 변형이 예상되는 경우 별도안정대책을 수립하여야할 것으로 판단됨.

5. 검토의견

○ 선사로의 변경설계에 대한 계약변경 심의절차 완료시까지는 상당 기간이 소요될 것으로 예상되며, 금년 11월 개통에 공기가 촉박하므로 기 완료된 설계도서 검토 결과에 의거 우선 시행토록 승인함이 타당한 것으로 사료됩니다.

* 보완 필요사항은 선사로 감리단에 기 송부

○ 다만, 상기 3항 변경내용으로 선 시공하되, 전체적으로 감액되는 공사비 약 863백만원에 대하여는 추후 계약변경 심의결과에 따라 공사비 확정 시 계약 변경하는 조건으로 시공사에 승인 통보함이 타당함.

붙 임 : 1) 관련자료  각 1부

2) 선사로~고덕지구간 도로확장공사 협조공문  1부. 끝.

확인자 : 책 임 감 리 원    우   재   경