2015년 기능보강사업 변경 검토 (도봉구-창동)

도봉구 창동종합사회복지관 기능보강사업 외벽도장공사와 전기증설공사의 사업 세부 내용 변경 요청이 있어 검토하고 그 결과를 보고함

□ 변경요청

○ 요청사항

- 사 업 명 : 외벽도장공사, 전기증설공사

- 변경사항 : 1. 외벽도장공사 단가 조정 및 싸인물 교체 추가
2. 전기증설 용량 축소 및 전력케이블·분전함·차단기 교체

(단위 : 천원)

사업명	내 용	기 존				변경요청
		계	시비	구비	자부담	계	시비	구비	자부담
외벽도장공사	사업비	43,890	30,723	13,167	-	43,890	30,723	13,167	-
	내용	- 전문가 조언 결과 외벽도장공사에 예산 과다 편성되어 사업량 축소(43,890천원 → 21,923천원) - 싸인물(입간판) 교체 추가(19,767천원), 설계비 추가(2,200천원)
전기증설공사	사업비	18,000	12,600	5,400	-	18,000	12,600	5,400	-
	내용	- 당초 60kw로 증설에서, 전문가 조언 반영하여 20kw로 사업량 축소 - 전력케이블, 분전함, 차단기 교체 추가

□ 요청사유

○ 외벽도장공사

- 당초 노후화 및 각종 오염물질로 인하여 외벽이 손상되어 있어 안전성 확보 및 복지관 이미지 개선을 도모하고자 “외벽도장공사” 기능보강사업을 신청함

- 그러나 건축사사무소, 건설전문업체의 전문가의 의견을 수립하여 견적을 받은 결과 외벽도장공사에 예산이 많이 편성되었고 설계비용을 포함시키지 못한 부분을 알게 되어, ① 외벽도장공사 사업량 축소, ② 외벽 싸인물(입간판) 개보수 및 ③ 설계비 추가를 통하여 복지관 이미지개선에 도움을 주고자 변경신청 함

○ 전기증설공사

- 당초 복지관 전체 전기사용이 계약전력 131kw의 95% 이상을 소모하고 있어, 추가 진행되어야 하는 사업(발달장애아동 공부방 전기판넬, 어린이집 바닥 전기판넬 공사) 진행함에 전력부족으로 어려움이 있어 전기증설을 60kw 신청함

- 그러나 전기안전공사협회 및 전기유지보수업체 전문가의 조언을 받은 결과 추가 진행되어야 하는 사업을 고려하고, 향후 전력증가 및 운영비용 면에서 나아질 것으로 판단되어 기존 ① 60kw에서 20kw으로 변경 신청(축소)하고자 함

- 또한 사업량 감소분을 통해, 시설물의 안전사고 예방을 위하여 ② 전력케이블교체 및 노후화된 분전함, 차단기 교체 등을 추가 진행

□ 검토결과 : “일부승인” - 서울시복지재단 타당성검토 완료

○ 승인내역

(단위 : 천원)

사업명	내 용	변경요청				결정내용				비고
		계	시비	구비	자부담	계	시비	구비	자부담
외벽도장공사	사업비	43,890	30,723	13,167	-	43,890	30,723	13,167	-	사업비 변동 없음
	내용	- 변경 없이 당초 계획대로 집행(승인불가)
전기증설공사	사업비	18,000	12,600	5,400	-	18,000	12,600	5,400	-	사업비 변동 없음
	내용	- 용량 조정 적정 및 안전 확보 위해 적정한 사업내용으로 판단됨(승인)

○ 검토내용

- 외벽도장공사 : 현장 확인 결과 시설의 양쪽 외벽과 건물 입구 등에 3개의 싸인물이 있음. 원거리에서도 잘 보이며, 상태가 양호하므로 당초 사업 계획대로 추진하는 것이 적정할 것으로 판단됨 - (승인불가)

- 전기증설공사 : 증설 용량은 현 증설예정 부하량에 맞게 적정한 수준으로 재산출하여 조정하는 것이므로 타당하며, 노후 차단기 및 전력케이블 등의 교체는 건물의 노후도 및 증설용량을 고려한 전기안전 확보를 위해 적정한 사업내용으로 판단됨 - (승인)