2015년 기능보강사업 변경 검토 (동작구-사당)

동작구 사당종합사회복지관 기능보강사업 강당방음공사의 낙찰차액을 사용하여 출입문 방음문 교체공사 요청이 있어 검토하고 그 결과를 보고함

□ 변경요청

○ 요청사항

- 사 업 명 : 강당방음공사

- 변경사항 : 기존 사업의 낙찰차액을 사용하여 (3,895천원 중 2,750천원) 강당 발코니 출입문 방음문 교체공사 추가

(단위 : 원)

사업명	내 용	기 존				변경요청
		계	시비	구비	자부담	계	시비	구비	자부담
강당방음공사	사업비	33,000,000	19,800,000	13,200,000	-	29,104,950	17,462,970	11,641,980	-
	내용	- 강당 창문 이중창 교체 및 벽면 흡음재 공사 완료 (낙찰차액 3,895,050원 발생 – 시비 부분 2,337,030원)
방음문교체공사 (추가)	사업비	-	-	-	-	2,750,000	1,650,000	1,100,000	-
	내용	- 낙찰차액 사용하여 강당 발코니 출입문 이중문 교체 추가

□ 요청사유

○ 강당방음공사(기존)

- 4층 강당에서 가요교실, 스포츠댄스 등 음향장치를 사용하는 다양한 프로그램이 진행중이며, 주변 지역은 주거 밀집지역으로 지역주민들로부터 소음 등으로 인한 민원이 다수 발생하여 이중창으로 교체 및 벽면 흡음재 공사 완료

※ 29,104,950원으로 낙찰되어 낙찰차액 3,895,050원 발생

○ 방음문교체공사(추가)

- 기존 강당방음공사 사업에 강당 테라스쪽 출입문이 방음문이 아니었으나 사업계획에서 누락되어 추가 공사 요청

□ 검토결과 : “승인” - 서울시복지재단 유선 검토 완료

○ 기존 사업과 연계된 사업으로서 동시에 사업 진행하는 것이 타당하다고 판단됨

※ 향후 사업신청 시 사업계획 철저히 검토하여 변경 사례 발생하지 않도록 주의