상수도공사 감독위탁 업무보고회 건의사항 검토 의견

□ 검토 의견(서부수도사업소)

연번	현 행	건의 사항	사업소 검토의견
1	2014년 공사감독 대상 중 67%가 야간공사로 시행되었으며, 이로 인해 공사 품질저하 등이 우려됨	공사 발주 시 가급적 주간공사로 전환하여 시행	공사 구간별로 현장 여건을 감안, 주야간 구분하여 공사 발주 시행
2	공사가 5~6월, 8~11월에 집중되고 있어 공사기간이 6개월 미만일 경우 행정처리, 품질관리 등 현장관리에 어려움	공사 감독 물량 분산을 위한 일부 공사 조기발주 및 공사기간 최소 6개월 이상 확보로 공사 관리 강화	사업규모에 맞게 공사기간을 산정하여조기발주 시행
3	포장 복구공사 및 폐기물처리는 모든 공사를 포함하여 사업소에서 통합 발주 (업무한계 불분명에 따른 업무조정)	공단 위탁 대상 사업만 분리 발주 (배급수관, 송배수관)	공단 위탁공사(배급수관,송배수관) 대상사업만 분리발주 하여 폐기물처리 업무를 공단에 위탁감독
4	포장 복구공사 및 폐기물처리 준공 업무 - 준공(기성)검사조서 제출(중부, 서부, 북부) - 준공 정산내역 제출(나머지 사업소) ※ 사업소 업무 담당이 차수별 기성검사를 시행하고 있음	포장 복구공사 및 폐기물처리 준공 업무 일원화 준공 정산내역 제출로 일원화	폐기물처리 준공업무는 송, 배급수관 정비공사와 연계되어 시설관리공단 감독이 준공(기성)검사 업무까지 모두 시행