제1차 설계변경 자문회의(소위원회) 검토의견 요약

건 명	검 토 의 견
선사로~고덕지구간 도로확장공사 - 현장사무실 기간연장	○ 가설사무소 제경비 2중 산정(감액바람)
동부간선도로(3공구) 확장공사 - 지하차도 교면포장공법 변경(PCMC포장)	○ 콘크리트 절단 단가는 m당 단가로서 1회 절단비용*9회로 계상 재검토 바람 - LMC포장 단가 5㎝ → 4㎝ 조정 (감액)
동부간선도로(3공구) 확장공사 - 수락고가차도(우측) 방음벽 소음감쇠기 설치 건	○ 방음벽은 공장 조립제품으로 재료비, 노무비, 경비를 경비로 일괄처리
목동교 성능개선공사 - 교각 코핑부보강, 가설벤트 제작 및 설치반영	○ 교대 콘크리트 타설수량 검토 (8ea 적용) ○ 강관 비계다리 실적공사비 적용
목동교 성능개선공사 - 기존 슬래브 절단크기 조정 및 낙하물방지공 변경	-
목동교 성능개선공사 - 품질시험 및 품질관리 활동비 반영	○ 품질시험실 면적 확인 바람(27㎡)
장안교(구교) 성능개선공사 - 구조물(교각) 시공에 대한 공기단축방안	○ 코핑강재 거푸집 설치해체 공사비 수직고 할증 제외 등 단가 재검토 ○ 코핑강재거푸집 설치해제시 장비조합(100톤 크레인)은 강재거푸집의 중량을 반영하여 장비 적용 ○ 가시설(띠장, 버팀보) 변경에 따른 구조에 대한 안전성 검토 ○ 가시설 설치공사 중 쉬트파일 근입깊이 5.5m를 4.0m로 변경
합정 외1개소 빗물펌프장 증설공사 - 보완설계 및 공사 실정보고에 대한 내역변경	○ 가시설 CIP 수량산출 확인 ○ 토출관로 가시설 버팀대는 스크류잭 설치를 검토 ○ 상수도 이설공사 소요자재는 KC 인증제품 사용

건 명	검 토 의 견
중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 - 중람물재생센터 시설현대화 방류관로 설계변경	○ 어스앵커 그라우팅 1,2차 주입량 확인 ○ 구내배관 평균높이 산출시 연장과 면적수량 불일치(P.33) ○ PVC PIPE D100 수량산출 근거 없으므로 제외(P.61) ○ 에폭시 방수→아스팔트 방수로 변경 ○ SGR공 기계기구/플랜트 설치해체 횟수 합계 확인(P.114) ○ 어스앵커 그라우팅 1차 및 2차 주입량 오류 시정 ○ 공사손해 보험료 적용 검토 ○ 철근 고재 처리비 누락 ○ 계측기 설치위치를 도면에 명기하여 현장관리
도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 - 서울대정문 앞 아스콘포장 파손부위 복구	○ 미끄럼방지포장 단가적용 재검토 ○ 프라임코팅 RSC-4→RSC-3로 표기 수정(P.46) ○ 혼합기층(동상방지층, t=40㎝)삭제 ○ 과속방지턱 아스콘(#78) 단위수량 재산정(P.55) ○ 절삭으로 발생한 폐기물 상차비 제외
도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 - 계측관리비 추가분 반영	○ 흙막이 가시설 장기화에 따른 안전성 검토 ○ 계측기간 연장은 협의단가가 아닌 낙찰률 적용
도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 - 복공구간 결빙에 따른 교통사고 저감 방안	○ 미끄럼방지포장 단가적용 재조정 ○ 교통관리원 배치에 대한 단가적용의 적정성 검토, 투입은 자세한 자료 필요
경춘철교 정비공사 - 배수시설 변경	○ 공사비 산출기초인 1식 단가적용은 세부적인 단가적용 근거제시 바람 ○ 세부 공종별 품셈단가 산출하여 비교 검토 ○ 그레이팅(B=80㎜)과 배수관(D=150㎜) 연결부 상세규격 적정성 검토