□ 공통 요구자료

7. 설계변경 공사현황

- 총차를 기준으로 최종 설계변경 사항 기재

(단위:원)

당 초 (최초계약)					변경후 (최종 차수)					발주부서 (담당 전화번호)
공 사 명	회 사 명	계 약 일	완 공 예정일	계약금액	변경계약		완 공 예정일	계약금액	변경사유
					차수	일자
한강공원 교량하부 휴게공간 조성공사 시행	(주)네오개발	2013.05.15	2013.06.28	177,055,000	1	2013.06.27	2013.06.28	176,286,000	현장여건 반영 (물량증감)	녹지관리과 최수영 3780-0849
이촌한강공원 강변테마 놀이터 조성공사	(주)서우건영	2013.05.15	2013.07.25	269,571,900	1	2013.08.08	2013.08.10	285,645,000	현장여건 반영 (물량증감)	녹지관리과 황은애 3780-0838
2013년 한강공원 인공구조물 녹화사업	금강종합조경㈜	2013.05.28	2013.07.27	169,052,180	1	2013.09.09	2013.09.30	168,155,000	현장여건 반영 (물량증감)	녹지관리과 정상철 3780-0836
2013년 한강공원 그늘쉼터 조성사업	(주)예건공영	2013.05.31	2013.06.30	54,503,640	1	2013.07.12	2013.07.12	59,310,000	현장여건 반영 (물량증감)	녹지관리과 김기수 3780-0848
2013년 운동시설 수준향상 및 확충공사	삼동랜드(주)	2013.07.19	2013.09.30	141,675,400	1	2013.09.28	2013.09.30	144,323,000	현장여건 반영 (물량증감)	녹지관리과 김기수 3780-0848
이촌공원 한강숲 조성공사	(주)에이아이펠라스	2013.10.30	2013.11.30	165,993,000	1	2013.11.24	2013.11.30	164,863,000	물량감소	녹지관리과 김원식 3780-0845
한강공원 편의시설 정비공사	(주)희담	2013.11.01	2013.11.30	40,826,700	1	2013.11.28	2013.11.30	44,230,000	현장여건 반영 (물량증감)	녹지관리과 최수영 3780-0849
양화한강공원 어린이놀이터 재조성공사	(주)화림원건설	2012.12.21	2013.04.27	247,560,000	1	2013.05.06	2013.05.10	248,045,000	현장여건 반영 (물량증감)	녹지관리과 황은애 3780-0838
강서가족피크닉장조성 전기공사	㈜효산이엔지	2012.12.20	2013.07.12	135,744,000	1	2013.07.12	2013.10.3	121,061,000	본공사 변경에 따른 물량증감	생태공원과 임이환 3780-0861
강서가족피크닉장조성공사	㈜영산씨엠 ㈜화림원건설	2012.12.7	2013.10.3	1,068,390,000	1	2013.10.30	2013.10.31	956,610,000	자전거도로선현변경에따른 식재및기타 시공수량 증감	생태공원과 석승우 3780-0644
양화 한강공원 생태공원화사업	영무건설(주) 화령종합조경	2012.12.31	2014.01.3	1,347,699,600	3	2013.12.30	2014.01.03	1,436,480,000	수목식재물량 및 기타물량 증감	생태공원과 서은교 3780-0629

(단위:원)

당 초 (최초계약)					변경후 (최종 차수)					발주부서 (담당 전화번호)
공 사 명	회 사 명	계 약 일	완 공 예정일	계약금액	변경계약		완 공 예정일	계약금액	변경사유
					차수	일자
한강공원 나들목 증설공사(신청담) -1차(장기계속)	한양개발(주)	2013.04.12	2015.12.20	8,410,690,000	2	2014.02.17	2015.12.20	8,410,690,000	물량변경	치수과 박정태 3780-0685
한강공원 나들목 증설공사(옥수) -1차(장기계속)	신성월드건업(주)외 1	2013.04.19	2015.09.30	3,493,426,000	1	2013.12.16	2015.09.30	3,676,000,000	협의사항반영에 의한 설계변경	치수과 박정태 3780-0685
2013년한강접근 시설유지보수공사	인명건설(주)	2013.02.28	2014.03.31	775,268,600	3	2014.03.18	2014.03.31	1,256,268,600	공사물량증가	치수과 최혜경 3780-0696
한강저수로 정비공사	관악산업(주)	2013.03.5	2013.10.31	1,856,999,000	1	2013.10.30	2013.10.31	2,166,149,000	수해예방대비 준설물량 및 준설토 반출량 증가	치수과 최승룡 3780-0656
상수원 취수장 주변 정비공사	유호 산업개발(주)	2013.03.12	2013.10.31	1,175,443,000	2	2013.11.7	2013.11.07	1,175,443,000	단순물량변경	치수과 최승룡 3780-0656
한강공원 나들목 증설공사 (낙천정)-1차	㈜승일토건	2013.04.09	2015.09.30	4,115,790,000	1	2013.12.16	2015.09.30	5,342,940,000	신규공종발생 및 물량변경	치수과 최승룡 3780-0656
하천시설 유지관리 및 응급복구공사	프라도건설(주)	2013.02.25	2014.03.31	961,996,500	3	2014.02.19	2014.02.28	1,689,972,180	수해복구공사 추가 시공 등	시설관리과 안덕용 3780-0644
한강공원 자전거도로 업그레이드공사	현덕건설(주)	2012.05.9	2013.12.20	1,265,593,020	1	2013.12.20	2013.12.30	1,332,682,680	탄천주변정비 추가시공 등	시설관리과 안덕용 3780-0644
자전거도로유지보수공사	(주)윈도우종합건설	2013.05.7	2013.12.31	324,615,900	1	2013.12.19	2013.12.31	324,207,810	시공물량정산	시설관리과 안덕용 3780-0644
한강공원기반 시설개선공사	씨아이종합건설(주)	2013.04.15	2013.10.11	675,936,000	1	2013.12.24	2013.12.31	668,800,000	물량변동	시설관리과 오상협 3780-0647
잠실철교~구리시계간 자전거·보행자도로 개선공사	신성건설(주)	2013.04.25	2013.12.31	912,556,279	2	2013.12.2	2013.12.10	1,122,770,000	공사물량증가	시설관리과 이나영 3780-0689
2013년한강수중보 기전시설물 보수공사	㈜일승하이텍	2013.04.24	2013.08.19	157,924,340	1	2013.08.19	2013.08.19	152,952,410	수량증감 및 제경비 정산	기전설비1과 김영일 3780-0672
2013년 한강공원 조명시설 유지보수공사	(주)대덕인더스	2013.03.25	2014.02.28	501,706,110	2	2014.02.05	2014.02.13	499,521,000	물량증감 (연간단가공사)	기전설비1과 문준호 3780-0659
한강야외수영장 유지보수공사	영천종합건설(주)	2013.03.20	2013.09.30	1,315,097,000	2	2013.09.08	2013.09.30	1,642,740,000	현장실측에 따른 물량증감 등	기전설비2과 권혁제 3780-0665
망원초록길 조성공사	통일건설(주)외 3개사	2009.12.30	2012.01.05	16,128,000,000	5	2013.02.12	2014.06.30	23,320,500,000	- 공사착공 후 기본 및 실시설계 도서반영 - 망원정 연결로 등 추가공사 반영	기전설비2과 민병기, 3780-0649

11. 지체상금 및 위약금 징수현황

(단위:원)

계 약 명	계약금액	준공 예정일	준공일 (준공검사일)	지체일수	지체상금징수액	기 타 (위약금)
공연유람선 사업준비 이행협약	15,000,000,000	미이행	-	-		200,000,000
전망카페 계약체결 거부에 따른 입찰보증금 귀속 등 9건						5,325,000

16. 점용료, 사용료, 변상금 징수현황

(단위:원)

재산의 표시	면적	사용료(점용료, 변상금)			비 고
		사용료	부가가치세	합계
여의도임시선착장 (사용료)	825㎡	1,275,500	면제	1,275,500
한 강 (점용료)	165,819㎡	858,502,320	83,306,960	941,809,280	세빛둥둥섬, 마리나, 유선장 등 수상 점용
한 강 (변상금)	13,785㎡	29,944,080	해당없음	29,944,080	23건
영등포구 여의도동 1 외 99개소	345,040㎡	2,884,666,150	221,511,590	3,106,177,740	변상금: 17,136,010 점용료: 3,089,041,730

21. 용역발주 현황, 계약현황(5천만원 이상 - 별첨양식#1)

22. 공사계약현황(1억원이상)

단, 전기, 통신소방공사는 8천만원 이상 – 별첨양식#3

23. 민간위탁사업 현황(3천만원 이상 - 별첨양식#4)

24. 민간보조사업 현황(3천만원 이상 - 별첨양식#4)