출력일자 :

(시 구 : 남부도로사업소,)   (부 서 : 관리단속과)   (세 목 : 전체)

기관명 :남부도로사업소

부서명 : 관리단속과

부과 결의내역서

2014-11-21 08:48:13

결의번호

납부자명

납부자주소

주민등록번호

결의일자

물건명

부과/등록일자

세목코드

세목명

국세 가산금

구세 가산금

총액(부가세 제외)

기금 가산금

본세 가산금

국 세

구  세

기 금

본 세

과세키(세목코드-과세년월-과세구분-과세번호)

결의금액

징수부 등재일

부가세

본세 이자

기금 이자

국세 이자

구세 이자

납부일자

항목1

항목2

항목3

항목5

항목4

항목6

（주）영산씨엠건설

상도터널 보수공사(2013년사고이월사업) 지체상금

-  서울 강남구 도곡동942-10 신화빌딩 501호

10-228301

[시일반]위약금및지체상금

3,903,040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10**************2-000001

0

4681402

산출근거 : 준공금액*0.001*11일(지체일수)

3,903,040

**************

3,903,040

지엘기술(주) 대표자

상도터널 보수공사(2013년사고이월사업)지체상금

-  전라남도 장성군 삼계면 수양로 46

10-228301

[시일반]위약금및지체상금

3,749,980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10**************2-000002

0

4681402

산출근거 : 준공금액*0.001*11일(지체일수)

3,749,980

**************

3,749,980

2

7,653,020

총건수

총금액(부가세 포함)

7,653,020

본세 합:

국세 합:

0

0

구세 합:

기금 합:

0

7,653,020

총액(부가세제외):

0

부가세: