“문화와 예술로 행복한 도시 만들기”
		서울문화재단
20211014_104404_9930			20211014_104405_0170		FI_C*********4017	본관21 서울문화재단 외부공간 옥상 및 기타 방수 공사
수신자				내부결재
(경유)
제목	본관21 서울문화재단 외부공간 옥상 및 기타 방수 공사

1. 대표이사방침 제66(2021.02.04.)호『2021년 서울문화재단 시설관리 기본계획』및 시설안전팀 제1088(2021.08.20.)호『서울문화재단 외부공간 방수 설계 용역』관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 안전하고 쾌적한 건물 환경을 조성하고자 아래와 같이 방수공사를 추진하고자합니다.

가. 공사개요

◦ 공 사 명 : 서울문화재단 외부공간 옥상 및 기타 방수공사

◦ 대상공간 : 총3곳 (서울무용센터, 서서울예술교육센터, 서교예술실험센터)

◦ 공사사유 : 정밀안전점검 및 시민모니터링단 점검 결과에 따른 대상공간 누수문제 해결을 위한 공사 추진

◦ 공사내용 : 3개 공간 옥상바닥 방수층 개선 및 창문틀 코킹 등 외벽 방수 공사

◦ 공사금액 : 一金 이억칠천칠백칠십오만원정 (￦277,750,000원 / 부가세 포함)

◦ 계약기간 : 계약일로부터 ~ 12.10(금)  ※ 시공기간 : 착수일로부터 ~ 29일 이내(11월 이내)

나. 입찰개요

◦ 입찰방법 : 긴급공고, 제한경쟁, 총액입찰, 적격심사, 단독이행, 종합□전문 업역규제 폐지 대상

◦ 입찰내용 : 세부내용 붙임1 “입찰공고문” 참조

구분	내 용	관련근거
긴급공고 (사유)	□ 해당 공사는 날씨(온도)에 민감한 습식공사로 11월 이내 공사 완료 달성을 위해 빠른 업체 선정 및 공사 착수 필요	□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조(입찰공고의 시기) 제4항 5호 □ 적격심사 대상 공사 긴급 공고기간 : 5일 ※공고일 7일
참가자격	□ 습식‧방수공사업 등록업체 또는 종합공사업종 건축공사업 또는 토목건축공사업을 등록한업체	□ 건설산업기본법 제16조(건설공사의 시공자격) □ 건설산업기본법 시행규칙 제13조의3(종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 도급받을 수 있는 전문공사의 범위) ※ 업역규제 폐지 대상
제한경쟁	□ 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체	□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제24조(지역제한입찰의 대상)
적격심사	□ 수행능력 10점, 입찰가격 90점 □ 종합평점 95점 이상을 얻은 자를 낙찰자로 결정	□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조 및 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(제2장 시설공사 적격심사기준 <별지6> 추정가격이 3억원 미만 2억원 이상인 입찰공사 평가기준 및 제10장 건설업역간 상호시장 진출 허용 공사의 낙찰자 결정기준 적용
단독이행	□ 입찰참가 업종인 습식방수공사업 100%로 시행 공사로서 하자발생시 책임소재 구분 불명확 □ 지역의무 공동도급제도 비대상	□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제88조(공동계약) 제2항 □ 지역의무 공동도급제도 대상 : 전문공사 7억원 이상

다. 추진일정(예정)

◦ 재단 감사실 일상감사의뢰 : 10.14.(목) / 완료 (결과 : 적정)

◦ 나라장터 입찰공고(긴급) : 10.19(화) ~ 10.25(월) / 7일

◦ 적격심사 및 계약체결 : 10.25(월) ~ 10.28(목)

◦ 공사시행 : 11.01(월) ~ 11.29(월)

◦ 준공검사 및 계약기간 완료 : 11.30(화) ~ 12.10(금)

라. 소요예산 : 一金 이억칠천칠백칠십오만원정 (￦277,750,000원 / 부가세 포함)

◦ 설계계약(건축사)을 통한 원가계산(일위대가,물량산출)에 의한 공사금액 산출

관련문서 : 1. 대표이사방침 제66(2021.02.04.)호 “2021년 서울문화재단 시설관리 기본계획”

2. 시설안전팀 제1088(2021.08.20.)호 “서울문화재단 외부공간 방수 설계 용역”

3. 재단 감사실 제949(2021.10.14.)호 “일상감사 의견 통보”

붙임문서 : 1. 입찰공고문 1부

2. 총괄 원가계산서 1부

3. 공간별 원가계산서 1부

4. 공사설명서 1부

5. 공사시방서 1부

6. 설계도면 1부

7. 공내역서(공고용) 1부

8. 부당계약특수조건 체크리스트 1부

9. 청렴계약 이행서약서 1부. 끝.

(단위 : 원)
품의일자	2021-10-14	품의구분	계약		품의총금액	277,750,000
정책	단위	세부	편성목	통계목	편성예산	예산잔액	품의금액
경영기획 및 관리	문화시설 이용 활성화	청계천청사 시설운영 및 관리	시설비	시설비	957,930,000	384,142,619	277,750,000

★사원			팀장			본부장	전결 10/14
협조자	사원			사원
시행	시설안전팀-1453	(	2021.10.14.	)	접수		(		)
우	02589	서울특별시 동대문구 청계천로 517	/
전화	02-3290-7138			/	ston8078@sfac.or.kr	/	부분공개(5)