서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	세곡2지구 보금자리주택사업 민원사항 처리결과 통보

1. 우리 시 문서 임대주택과-11622(‘16. 9.20)호 및 귀 공사 문서 택지계획부-3860(’16. 9.29)호와 관련임.

2. 위와 관련 강남구청 치수과에서 처리요청한 민원사항에 대하여 아래와 같이 처리하였음을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

※ 민원내용

- 방죽1, 2마을 주민들은 세곡2지구 보금자리주택 개발에 따른 환경을 이유로 우·오수처리 방식을 분류식으로 변경요구.

※ 검토사항

- 서울주택도시공사와 상기 민원내용을 해소하기 위해 관계자회의(2회:10월 5일 및 10일)를 개최한 바, 마을 환경을 이유로 우·오수처리 방식을 합류식에서 분류식으로 변경해 달라는 방죽마을1, 2의 민원내용은 세곡2지구 보금자리주택사업시행으로 인해 기존 방죽마을1, 2의 생활환경 및 우·오수처리 방식이 악화된다는 마을주민들의 설명은 객관적으로 입증할 수 없는 사항으로 우·오수처리 방식변경 요구는 설득력이 미약함.

- 그럼에도 불구하고 세곡2지구 보금자리주택사업에 따른 민원임을 감안 서울주택도시공사에 긍정적으로 검토하도록 지시(관계자회의시) 및 처리대책을 제출토록 한 바, 방죽마을1, 2의 우·오수처리 방식을 합류식에서 분류식으로 변경시 공사비가 약 40억~50억 가량 추가로 소요되는 등 예산확보의 어려움 및 지구계획변경 등이 수반되어야 하므로 서울주택도시공사에서는 수용이 불가하다는 입장임.

※ 조치(처리)의견

- 따라서, 방죽마을의 우·오수처리 방식을 합류식에서 분류식으로 변경하는 사항은 귀구에서 필요성을 검토 후 별도의 예산을 확보하여 해결해야 할 것으로 판단됨.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	장천섭		택지개발팀장	김준표		임대주택과장	10/21 임인구
협조자	주무관	최영
시행	임대주택과-13149	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개