투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	(주)뉴 램건설 대표 한영의 귀하
(경유)	강동구 천호대로 1065 성원상떼빌 213호(천호동)
제 목	준공기한 연기에 따른 재계약 요청

1.귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.귀 사와 계약체결하여 시행중인 시행중인 『남산예장자락 재생사업 철거공사』의 계약기간을 아래와 같이 변경되어 통보하오니 기간연장에 따른 재계약 절차를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 철거공사

나. 공사규모 : 건물철거 4동, 가시설 1식

다. 계약금액 : 585,448,790원

라. 공사기간 :

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
계약기간	2016. 7.21 ~ 2016.10.24	2016. 7.21 ~ 2016.11.30	증) 37일

마. 연기사유 : 사업장내 문화재 조사에 따른 지중 돌발상황대비 및

폐기물 처리 등.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이석근		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	10/20 임춘근
협조자
시행	방재시설부-16382	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8765	/전송	02-3708-8756	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개