문서번호	서울숲공원관리사무소-5624
결재일자	2016.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
박선재		김완수	10/20 윤학수
협 조
	운영팀장			김흥창

『서울숲공원 시설보수 및 생육환경개선 폐기물처리용역』

설 계 변 경 시 행 보 고

2016.  10

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

『서울숲공원 시설보수 및 생육환경개선 폐기물처리용역』

설 계 변 경 시 행 보 고

『서울숲공원 시설보수 및 생육환경개선공사 폐기물처리용역』시행과 관련하여 현장여건 및 시공물량의 증.감 발생에 따라 설계변경을 시행하고자 아래와 같이 보고함

Ⅰ		용역개요

용역명 : 서울숲공원 시설보수 및 생육환경개선공사 폐기물처리용역

용역개요 : 폐기물처리 276.30톤(폐콘크리트195.8톤,폐아스콘80.5톤)

용역기간 : 2016. 9.30 ~2017.01.07

계약금액 : 10,100,000원

도 급 자 : 서울환경 대표 양성희

Ⅱ		폐기물 발생 현황

폐기물 발생내역

대 상 지	작 업	종 류	비 고
방문자센터 주변 포장공사구간	처리	폐콘크리트 250톤	- 포장공사 구간 하부 폐콘크리트 처리물량 추가분
	운반	폐콘크리트 108.69㎥

폐기물 변경내역

구 분	폐기물종류	당 초	변 경	증 감	비 고
폐기물처리	폐콘크리트	195.8톤	445.8톤	250톤
	폐아스콘	80.5톤	80.5톤	-
폐기물운반	폐콘크리트 · 폐아스콘	119.38㎥	228.07㎥	108.69㎥

Ⅲ		설계변경 금액

설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총용역비		10,100,000	19,250,000	증9,150,000
도급비	공급가액	9,181,819	17,500,000	증8,318,181
	부가세	918,181	1,750,000	증831,819

예산과목 : 동부공원녹지사업소운영과, 공원녹지관리수준

향상및도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원,

서울숲공원운영및보수,시설보수정비,시설비

Ⅳ		행정사항

현장여건에 따른 물량변동 사항에 대하여 설계변경코자 함

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.