문서번호	시설보수과-5781
결재일자	2016.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	10/21 이성재
협조

『중랑천 차집관로 성능개선 공사』

현장실정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『중랑천 차집관로 성능개선 공사』

현장실정 검토보고

우리센터에서 시행중인 『중랑천 차집관로 성능개선 공사』의 도급자로 부터 현장실정보고 문서가 접수되어 이에 대한 검토보고임.

1		사업개요

□ 위    치 : 중랑천(방학동 현대아파트~창동 문화체육센터)

□ 사업기간 : ‘16.09.09 ~ ’16.12.31

□ 사 업 비 : 1,590백만원(도급 959백만원, 관급 369백만원, 이전 262백만원)

□ 도 급 자 : ㈜승일토건  대표 박영온

□ 공사내용

- D=800~1,800mm, L=506m(D=800mm → 306m, D=1,800mm → 200m)

- 가시설(조립식 간이 흙막이) 304m, 강판차수공 200m, 아스콘 포장 15.71a

2		실정보고 내용

□ 본 공사의 1,800mm PC관 부설구간에 우회 산책로를 제방 상단부를 이용         하고자 했으나 동부간선도로 확장 공사 구간으로 우회 산책로 설치 곤란

3		검토결과

□ 동부간선도로 확장 공사구간은 현재 자재(철근 등)가 적치되어 있어 제방 법면에      가설재를 이용하여 임시 산책로 조성 필요(설치 면적 950㎡)

4		조치의견

□ 통행시민 안전과 원활한 공사시행을 위하여 도급자로 하여금 제방법면에         가설재를 이용한 임시 산책로를 우선 시공토록하고 추후 설계변경에 반영        정산처리(증 40,580천원)

붙임 : 관련문서 1부.    끝.