문서번호	계획설계과-9122
결재일자	2016.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
최영서	이임섭	이규상		10/21 정중곤
협 조

『우면산가압장 급수체계 개선 지반조사 용역』

설계변경 검토 보고

2016. 10.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 이임섭 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『우면산가압장 급수체계 개선 지반조사 용역』

설계변경 검토 보고

『우면산가압장 급수체계 개선 지반조사 용역』실적 수량이 설계 수량과 상이하여 실적에 맞게 정산코자 보고 드림.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 우면산가압장 급수체계 개선 지반조사 용역

□ 용역내용

○ 지반조사(보링공, 표준관입시험), 실내토질 시험, 내진설계 시험

□ 용역기간 : 2016. 6. 7. ~ 2016. 11. 3.

□ 용역업체 : ㈜동광지오엔지니어링 대표 김태진

□ 계약금액 : 금15,203,000원

Ⅱ		계약금액 변경 검토

□ 추정 수량으로 설계한 보링공과 표준관입시험을 실제 시행한 수량으로 정산                                              증) 금138천원

○ 보링공 시추깊이 : 당초 22m  → 변경 27.8m(증 5.8m)

○ 표준관입시험    : 당초 20회  → 변경 14회(감 6회)

- 1m 간격으로 계획했으나 1m 간격 또는 지층이 변화하는 지점에서 실시

□ 손해배상 보험료를 실 납부금액으로 정산            감) 금84천원

Ⅲ		검토결과

□ 계약금액 변경 계약 요청(→ 본부 재무회계과)

○ 당초 금15,203,000원 → 변경 금15,257,000원 (증 54,000원)

붙 임 : 1. 변경계약내역서 1부

2. 손해배상 보험 증권 1부.  끝.