투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	지하철 9호선3단계 시스템분야 전면책임감리용역(2차) 변경계약 의뢰

1. 재무과-60039호(`15.12.7) 및 도시철도설비부-11944호(`16.10.18)와

관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리본부에서 시행중인 서울지하철 9호선3단계 시스템

분야 전면책임감리용역(2차)에 대한 계약변경을 아래와 같이 요청하오니 조치하여

주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : *********************************(2차)

나. 용역개요 : 연장 9.14km, 정거장 8개 역사(931 ~ 938정거장)

- 위 치 : 송파구 종합운동장 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원앞)

- 범 위 : 지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 시설공사 책임감리

다. 계 약 자 : 세종기술(주) 외 2개사 공동도급(분담이행방식)

라. 계약일자 : 2015.12.7

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도 9호선 3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

바. 변경내용

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
2 차	기 간	`16.1.1 ~ `16.12.31	변경사항 없음
	금 액	826,000천원	650,000천원	감 176,000천원

사. 변경사유 : 감리원 투입시기 조정(통신 및 신호분야)

붙임 : 1. 계약변경 시행 보고서 - 1부.

2. 변경전 내역서 및 감리원 투입계획(2차) - 1부.

3. 변경후 내역서 및 감리원 투입계획(2차 1회) - 1부.

4. 변경계약 합의각서(2차 1회) - 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	고명규		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	10/21 정찬웅
협조자	계약2팀장	양주춘
시행	도시철도설비부-11523	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7272	/전송	02)772-7308	/	rhaudrb@seoul.go.kr	/	대시민공개