문서번호	공간정보담당관-11672
결재일자	2016.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
최지혜		김태준	10/24 조봉연
협조

2016년 항공사진 고도데이터서비스 사업 주간업무(10월3주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-3311				122,850천원

2016. 10.

정 보 기 획 관

(공간정보담당관)

2016년 항공사진 고도데이터 서비스 사업

주간업무(10월 3주) 보고

사업명			2016년 항공사진 고도데이터 서비스
사업기간			‘16.7.12.~‘16.12.31.	서울시담당		공간정보담당관 최지혜
사업비			122,850천원	업체/PM		㈜씨엠월드 컨소시엄 박철희 차장
보고기간			‘16.10.17.~‘16.10.21.	전체공정율		계획 42.49% / 실시 42.49%
주요내용			1. 수치표고모델 분석 및 확인(공간정보산업진흥원) 2. 항공사진 DB구축(파일 포맷 변환 및 진북방향 편집 완료 / 주기표시 삭제 완료 / 해상도 변경 완료)
주간 업무 보고
Part	금 주 실 적 (2016.10.17 ~ 2016.10.21)				차 주 계 획 (2016.10.24 ~ 2016.10.28)
사업관리	1. 사업관리 - 개발 및 DB구축 일정 체크 - 중간보고회 자료 검토 및 수정				1. 사업관리 - 중간보고회 수행 일시 : 2016년 10월 17일 오전 10:00 장소 : 스마트 정보지원센터(서소문청사 1동3층)
시스템 개발	1. 구현 - 항공사진 신청 / 승인 알람 기능				1. 구현 - 항공사진 신청 / 승인 알람 기능 테스트 - 시도행정연계 – 방문민원 정보 조회
DB구축	1. 항공사진 DB 변환 및 정비 - 파일 포맷 변환 및 진북방향 편집 : 진북방향 확인 및 편집 - 주기표시 삭제 : 해상도 10Cm 주기 삭제 - 해상도 변경(10Cm --> 25Cm) - 기무사 보안 처리				1. 항공사진 DB 변환 및 정비 - 기무사 보안 처리 2. 수치표고모델 - 공간정보산업진흥원 제공 데이터 재수집 및 분석
산출물/ 별첨자료	○ 주간보고서 1부.
협조사항
對 서울시
對 용역업체
기타