함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	'우면산가압장 급수체계 개선 지반조사 용역' 계약금액 변경에 따른 조치 의뢰

1. 재무회계과-8199(2016. 5. 30.)호와 관련입니다

2. 우리 본부와 계약체결되어 추진중인 아래 용역에 대하여 계약금액 변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 우면산가압장 급수체계 개선 지반조사 용역

2) 용역기간 : ’16. 6. 7. ~ ’16. 11. 3.

2) 계 약 자 : ㈜동광지오엔지니어링 대표 ***

3) 계약금액 : 금15,203,000원

나. 변경내용

1) 계약금액 변동

가) 당초 금15,203,000원 → 변경 금15,257,000원(증 54,000원)

2) 변경사유 : 추정하여 설계한 수량을 실제 시행한 수량으로 변경하고 보험료를 실 납부금액으로 정산

붙  임 : 1. 설계변경 검토보고(변경내역서 포함) 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	계획설계과장
주무관	최영서		계획설계과장	10/24 이임섭
협조자
시행	계획설계과-9151	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1414	/전송	3146-1429	/	9373@seoul.go.kr	/	부분공개(6)