함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	배급수관정비공사 실정 검토결과 통보

1. 귀 공단에서 감독중인 “서초동1438~1445번지 외 5개소 배급수관정비공사”와 관련하여 현장실정에 대한 우리사업소의 검토결과를 다음과 같이 통보하오니 업무 수행에 차질이 없도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 당초설계 구간인 4~5구간은 주민의견 청취결과 대다수가공사시행에 반대입장을 취하고 있어 금년 시공이 불가할 것으로 판단됨

나. 따라서 귀 공단에서는 계약업체와 협의하여 합의에 의한(합의서 작성등) 공사를 타절할 수 있도록 조치 하시기 바랍니다.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	안규태		시설관리과장	10/25 박희철
협조자
시행	시설관리과-24949	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4909	/전송	02-3146-4939	/		/	대시민공개