투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강서도서관 옥상녹화·텃밭조성공사 설계변경(정산) 시행

1. 시설과-4072호(2016. 10. 24)와 관련입니다.

2. 2016 공공건물 옥상녹화·텃밭조성사업의 일환으로 우리사업소에서 시행중인 강서도서관 옥상녹화·텃밭조성 공사에 대하여 다음과 같이 보험료 정산 및 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 강서도서관 옥상녹화·텃밭조성 공사

나. 위    치 : 강서도서관 (강서구 등촌동 520-6)

다. 공사개요 : 수목식재, 휴식시설 설치 등 옥상녹화

라. 공사기간 : 2016. 9. 9  ~ 2016. 11. 7

마. 공사금액

- 당  초 : 159,898,000원

- 변경후 : 157,937,000원(감1,961,000원)

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감 액	비 고
도 급 액	159,898,000	157,937,000	감 1,961,000
공급가액	145,361,819	143,579,091	감 1,782,728
부 가 세	14,536,181	14,357,909	감 178,272

바. 변경내역

- 당  초 : 자산홍 등 3종 1,030주 및 구절초 등 32종 13,150본 식재, 데크, 파고라, 텃밭상자 등 17종

- 변경후 : 자산홍 등 3종 1,030주 및 구절초 등 32종 13,150본 식재데크, 파고라, 텃밭상자 등 18종, 보험료 정산 등

사. 도 급 자 : 대건종합건설주식회사  대표 김 추

아. 변경사유 : 현장여건에 따른 시공내역 조정, 강서도서관 측 요구사항 수용 및 보험료 정산

붙 임    1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 도서(별도)1부.

3. 제비율검증 1부.  끝.

주무관	배소윤		조경시설팀장	이용원		시설과장	代이용원		서부공원녹지사업소장	10/26 오진완
협조자	공원운영과장	문근식
시행	시설과-4098	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	300-5535	/전송	300-5569	/	syhouse@seoul.go.kr	/	부분공개(5)