문서번호	급수운영과-23620
보존기간	년
결재일자	2016.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		주무관	급수운영과장
남상욱		이승완	10/26 이계환
협 조

설계변경 심의결과 보고

(하계동 273~357번지외 1개소 송배수관정비공사)

2016. 10.

북부수도사업소

급수운영과

설계변경 심의결과 보고

우리사업소에서 시행중인 「하계동 273~357번지외 1개소 송배수관정비공사」에 대해 시공물량 증·감 등으로 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

1. 공사 개요

1) 공 사 명 : 하계동 273~357번지외 1개소 송배수관정비공사

2) 공사기간 : 2016. 5. 10. ~ 2016. 11. 9.

3) 공사비 변경

구 분	금 액		증·감
	당 초	변 경
도 급 액	276,258,040	253,530,000	감 22,728,040
공급가액	251,143,673	230,481,818	감 20,661,855
부 가 세	25,114,367	23,048,182	감 2,066,185

4) 도 급 자 : 한밭건설㈜  대표 여순란

5) 감 독 자 : 시설관리공단 공사감독2처 최문선

2. 심의회 개최현황

1) 심의일정 : 2016. 10. 25. 16:00

2) 심의장소 :  급수운영과 사무실

3) 심의위원장 : 급수운영과장

4) 심의위원 : 시설7급 김종필, 시설7급 강대유, 시설7급 정성식, 시설7급 이한수

3. 심의 내용

1) 물량변동의 적정성 여부

2) 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 심의 결과

1) 설계변경의 타당성 : 타당함

2) 신규공종 단가 산축 적정 여부 : 적정함

3) 계약변동(증·감)물량 계약단가 낙찰률 적정 적용 여부 : 적정함

4) 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

5) 각종 제반규정 준수 여부 : 준수

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역 심의결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

첨 부 : 1) 설계변경 심의 결정서 1부.

2) 설계변경사유서 1부.

3) 설계변경내역서 1부.

4) 제비율 검증 내역서 1부.  끝.