문서번호	시설과-5908
결재일자	2016.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장
강희진	임록화	10/26 진병규
협 조

개포디지털혁신파크태양광발전시설기초보강및전기배선공사

설계변경(정산) 검토보고

2016. 10

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

개포디지털혁신파크태양광발전시설기초보강및전기배선공사

설계변경(정산) 검토보고

○ 우리사업소 시행 개포디지털혁신파크태양광발전시설 기초보강 및 전기배선공사에 태양전지판 하부를 휴식공간으로 사용하기 위한 보완등 변경사항이 발생하여 아래와 같이 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		공사현황

❍ 공  사  명 : 개포디지털혁신파크태양광발전시설기초보강및전기배선공사

❍ 공사개요 : 태양광발전시설 기초보강 및 전기배선공사 1식

❍ 계약금액 : 10,480천원

❍ 공사기간 : ‘16, 9. 9 ~ ’16. 10. 26

❍ 도 급 자 : (주)케이디파워 대표이사 김임배

Ⅱ		설계변경내용

구분	당초	변경	변경사유	비고
구조물	H형강용융아연도금, :1520Kg, 잡철물	H형강용융아연도금 생략, 잡철물 단가감소	H형강광명단도장 마감(H형강기본도장)	감 1,623 천원
	태양광지지 철재구조물 용융아연도금 마감	태양광지지 철재구조물 용융아연도금+기와진회색	이미지 개선(태양광전지판하부쉼터공간)	증 2,821 천원
	태양광전지판 사이 공간 발생	실리콘을 태양광전지판 사이에 시공하여 빗물흐름 방지	비샘 방지(태양광전지판 하부 쉼터공간)	증516 천원
배관 및 배선자재	통신케이블 115.6m,	통신케이블 42.4m,	태양광 PC․현황판 ․통합모니터링	감19 천원
	전선관 61.3m	전선관 28.3m	위와 같음	감51천원
	기타 자재	기타 자재	인버터PC 현황판 위치변경 -> 물량증감	감1,644천원
계				변경금액:0

Ⅲ		공사금액

❍ 계약금액 : 10,480천원(변경없음)

Ⅳ		조치의견

❍ 위 검토내용을 내역서에 반영, 변경하고 운영과에 공사 설계변경 의뢰

별첨 : 설계변경서 및 공사 제비율 검증확인서 각 1부.  끝.