“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	사회복지과-48287		주무관	장애인복지팀장		사회복지과장		복지문화국장
			이은수	심미례		이규형		10/26 박철수
등록일자	2016.10.26.
결재일자	2016.10.26.
공개구분	대시민공개
			협조자

충현복지관 식당설치공사 준공계약기간 연장계획

시설 현황

시 설 명	위 치	시설장	연면적 규모(㎡)	이용인원(일)	운 영 법 인	건축년도
충현복지관	논현로 98길16	강태인	4,145	250명	충현복지재단	1993년

공사개요

❍ 총 공사금액 : 178,000천원 (시비90%, 자부담10%)

❍ 사업기간 : 2016.5.27.~ 11.05

❍ 발주방법 : 구 발주 전자공개 입찰 (총공사비 1억원이상 개보수해당)

준공계약기간 변경내용

준공기한		비고
당 초	변 경
2016.10.27	2016.11.07	10일 연장

연기사유

❍ (건축․기계분야) 그리스트랩 제작 및 트랜치 연결설치로 인해 공사기간 연장 필요

❍ (전기분야) 선행공정연기에 따른 후속공정 연장 필요

2016. 10.   .

	강 남 구
(		사회복지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 장애인복지법 제81조(비용의보조) 및 동법시행령 제44조 • 제17조 (설계서 등의 검토), 제25조 (공사감독자의 의견 제시 등),
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 충현복지관 식당 공사에 따른 건축/기계설비 공사부분 추가 공사요청 및 전기분전반 위치변경 요청에 따른 설계변경사항 검토
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 복지관이용구민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ○ ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 전문가 : 건축과 시설팀 자문

충현복지관 식당설치공사 준공계약기간 연장계획

충현복지관 무료식당 설치공사 추진에 따른 건축,기계설비,전기

공사에 대한 안전보강사항 발생으로 설치보강 기간이 필요하여

공사기간을 연장코자 함

Ⅰ		관련근거

□ 공사계약일반조건 제6절~7절

□ 건설공사 감독자 및 공사관리자 업무지침 제41조(설계변경 및 계약금액 조정)

□ 사회복지사업법 제34조3(시설의 안전점검등)

□ 충현복지관 기능보강사업 변경 검토결과 : 서울시장애인자립지원과-16794호 (2016.10.06)

※ 공정회의록(16.9.9) 등 건축과 검토의견 반영

Ⅱ		개 요

□ 기능보강시설 현황

시 설 명	위 치	시설장	연면적 규모(㎡)	이용인원(일)	운 영 법 인	비 고
충현복지관	논현로 98길16	강태인	4,145	250명	충현복지재단	법인

□ 총 공사금액

복지관명	사업명	사업비 지원액(천원)				비 고
		계	시비	구비	자부담
충현복지관	무료급식소설치공사	178,000	160,200	-	17,800

□ 계약내용

구 분	건축·기계분야	전기분야	비 고
계약업체	㈜명지건업	㈜남영전설
계약금액	83,706,160원	20,715,720원
계약연월일	2016. 08. 25	2016. 08. 24
준공일	2016. 10. 27	2016. 10. 27

Ⅲ		변경내용

□ 준공기한 변경내용

준공기한		비고
당 초	변 경
2016.10.27	2016.11.07

□ 연기사유

(1) 건축 ․ 기계분야 : 그리스트랩 제작 및 트랜치 연결설치로 인해 공사

기간 10일 연장 필요

(2) 전기분야 : 선행공정연기에 따른 후속공정 연장 필요

□ 예산과목 : 장애인자립생활기반 구축, 장애인복지시설확충지원

장애인복지관기능보강, 민간자본보조

Ⅳ		행정사항

□ 지연배상금 부과여부 : 미부과.  끝.

여기에 본문을 입력하세요