함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(거여동 133-77 ~ 135-6간 외 2개소 송배수관 정비공사)

우리 사업소에서 시행하고 있는 「거여동 133-77 ~ 135-6간 외 2개소 송배수관정비공사」에 대하여 준공기한 연기사유가 발생되어 아래와 같이 준공기한 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내용

1) 공 사 명 : 거여동 133-77 ~ 135-6간 외 2개소 송배수관정비공사

2) 계 약 자 : ㈜가가설비  대표 이성주

3) 계약금액 : 410,332,880원

4) 준공기한

- 당 초 : 2016. 05. 02 ~ 2016. 10. 30.

- 변 경 : 2016. 05. 02 ~ 2016. 11. 28.

5) 준공기한 연기사유

- 1구간 하수도 병행공사 실시

- 폭염으로 주간 작업 중지

- 도시철도공사 파업으로 굴착 협의 지연

나. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 합의서 및 변경예정공정표 1부. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	조봉구		급수운영과장	10/27 전명수
협조자
시행	급수운영과-20268	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5172	/전송	02-3146-5189	/		/	부분공개(5)