문서번호	급수운영과-26154
결재일자	2016.10.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
전성호		김찬모	10/27 박길영
협 조

『2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사』

설 계 변 경 보 고(2회)

2016. 10.

서 부 도 사 업 소

[급수운영과]

『2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사』

설 계 변 경 보 고(2회)

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(단가계약)

공사규모 : 아스팔트 포장 131.47a, 콘크리트 포장 1.74a, 보도블록 포장 7.64a,

아스팔트표층포장 239.42a

공사기간 : 2016.07.21. ~ 2016.10.06.

총공사비 : 1,714,224,600원(도급비 : 1,368,363,600 관급비 : 345,861,000)

계약상대자 : 라텍씨앤씨(주) 대표 박기춘

감 리 자 : 서울특별시 시설관리공단, ㈜이준엔지니어링

Ⅱ		주요 변경사항

주요 설계변경 사유

- 공사현장 여건변화 등으로 인한 신규공종 발생 및 복구물량 증,감에 따른 변경 (내역서 참조)

ㆍ토  공 : 아스팔트포장절단 물량 외 28공종 증.감

ㆍ포장공 : 보조기층공 물량 외 81공종 증.감

ㆍ부대공 : 소형공사안내 설치 철거외 21공종 증.감

ㆍ사급자재 : 보조기층재 외 5공종 증.감

- 세부변경 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증․감
아스팔트 포장	a	131.47	169.8	증)38.33
콘크리트 포장	a	1.74	1.75	증) 0.01
보도블럭 포장	a	7.64	16.58	증) 8.94
아스팔트표층포장	a	239.42	224.68	감)14.74
계		380.27	412.81	증)32.54

설계변경 내역 : 도급비 변동 없음

구 분	총 부 기 금 액		1 차 계 약 금 액		2 차 계 약 금 액
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
총공사비	1,714,224,600	1,714,224,600	1,200,554,700	1,200,554,700	513,669,900	513,669,900
도 급 비	1,368,363,600	1,368,363,600	958,452,000	958,452,000	409,911,600	409,911,600
관 급 비	345,861,000	345,861,000	242,102,700	242,102,700	103,758,300	103,758,300

Ⅲ		조 치 의 견

공사현장 여건변화 등으로 신규공종 발생 및 포장복구물량 증,감이 예상되어 상기와 같이 사업소 자체 계약금액(설계변경)변경 심의 소위원회에 상정 심의후, 재계약하여 소규모 포장도로굴착 복구업무 추진에 만전을 기하고자합니다.

따로붙임 : 설계변경 내역서 1부. 끝.