문서번호	설비부-16656
결재일자	2016.10.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
박병환	김영수	10/27 권오식

『경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사』

설계변경 및 준공기한연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사』

설계변경 및 준공기한연기 검토 보고

『경춘경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사』관련 책임건설사업관리기술자로 부터 설계변경 및 준공(납품)기한 연기 검토 보고임.

관련근거

□ 선진경춘감-16-744(’16.10.26)호---준공기한연기 및 계약금액조정

공사개요

□ 위   치 : 노원구 경춘철교~산업대3길 고가철교

□ 규  모

- 공원조성 연장 L= 1.1㎞

- CCTV설비 13대, 방송설비, 기타 통신설비공사

- 공릉지하보도 및 객차 건축 통신공사 1식

- 시 공 사 : *****

- 감 리 사 :****************

□ 계약기간 :  2015.11.04. ~2016.10.31

설계변경 현황

□ 변경 설계금액

(단위 : 원)

구 분	변 경 내 용			비 고
	변 경 전	변 경 후	증·감
공급가액	201,282,109	208,179,091	증5,896,982
부 가 세	20,228,211	20,817,909	증589,698
도 급 비	222,510,320	228,997,000	증6,486,680

□ 설계변경 사유

- 산출내역서상 내역 변경.

□ 설계변경 내용

구 분	공 종	변경 내용	비 고
통 신	옥외통신공사	엘리베이터 통신선로 추가 방송 스피커 중복 물량 변경	설계내역서 참조
	객차/공릉지하보도	- 방송 (앰프2세트) 및 빔프로젝트 설치 (3세트)에 따른 배관/배선 추가	〃
	노원구 요구사항	엘리베이터CCTV 4대 추가설치에 따른 배관/배선 추가	〃
	주민요구사항	이마트 방향 CCTV 1대 추가 설치	〃

준공기한 연기(전기)

- 당 초 : 2015.11.04.~2016.10.31

- 변 경 : 2015.11.04.~2016.11.30.(증 30일)

□ 준공기한 연기 사유

- 과학기술대 교량공사 진행으로 통신공사 시기 미도래로 연기.

□ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미 부과

보고자 검토의견

□ 감리검토 의견과 같이 노원구 및 주민 요구사항 등을 공사 설계변경 정산처리 하고자 하며, 통신공사 및 관급자재 준공(납품)기한을 연기코자 함.

□ 설계변경 및 준공기한 연기에 대해 계약부서인 건설총괄부에 의뢰코자 함.

붙 임 :  1. 감리실정보고 각 1부.

2. 준공기한연기 관련공문 1부. 끝.