서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	**********
(경유)	***************************************
제목	하도급 사전승인 요청 검토의견 통보(마포대교 안전시설 설치공사)

1. 1종교량 16-486(2016.10.317)호와 관련입니다.

2. 1종교량 보수·보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 수행과 관련하여 사전승인을 요청하신 「한강교량(마포대교) 안전시설 설치공사」의 건설공사 하도급 승인에 대한 검토결과를 다음과 같이 알려드립니다.

3. 아울러, 안전시설 설치공사 추진공정이 저조한 상황임을 감안하여 공정을 만회할 수 있는 시공계획서를 작성하여 제출할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

하도급사의 공사실적을 검토한 바, 교량의 기존 난간위에 난간을 추가 설치하는 공종이 주공정인 마포대교 안전시설 설치공사의 품질 및 시공 능률을 높이는 데는 어려움이 많을 것으로 판단되어 하도급을 승인할 수 없음을 알려드림. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	오석관		교량기획팀장	오재영		교량안전과장	10/27 박문희
협조자
시행	교량안전과-19541	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시 서소문별관 1동2층 교량안전과	/
전화	2133-1943	/전송	2133-1429	/	ohsukk@seoul.go.kr	/	대시민공개