문서번호	시설관리과-22059
결재일자	2016.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
김주경	남정열	10/27 김명용
협 조

준공기한 연기보고

(암사동 501-3~496-26 외 8개소 배급수관 정비공사)

2016. 10. 27.

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

준공기한 연기보고

우리사업소에서 시행중인 “암사동 501-3~496-26 외 8개소 배급수관 정비공사”와 관련하여 공사감독청인 서울특별시 시설관리공단으로부터 작업방법 변경에 따른 유관기관과의 추가 협의기간 등으로 인하여 공사기간이 부족하여 준공기한 연기요청이 있어 보고 드림.

Ⅰ		공사현황

가. 공 사 명 : 암사동 501-3 ~ 496-26 외 8개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2016. 5. 9. ~ 2016. 11. 4.

다. 도 급 액 : 474,686,170원

라. 공사개요 : D=20~300㎜, L=1,906m

마. 계약상대자 : 제이엘피건설㈜  대표 김미경

바. 감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		시설관리공단 실정보고 내용

가. 건설폐기물 처리 용역업체 계약지연으로 상수도공사 추진 지연 : 22일

○ 기존 건설폐기물 처리 용역업체 반출기한 : 7월 22일

○ 신규 건설폐기물 처리 용역업체 계약(8.30) 후 첫 반출일자 : 9월 8일

○ 위 기간 중 중간 집하장을 이용하여 7.22~8.12 및 9.5~9.8일은 작업 시행

○ 폐기물 반출이 불가하여 22일간(8.13~9.4) 공사 추진이 지연됨

나. 2구간 야간공사를 주간공사로 작업시간 변경에 따른 유관기관과의 추가 협의기간 소요 : 12일

○ 10월12일 2구간(암사동) 야간공사 중 소음민원이 과다하게 발생하여 공사 중지함

○ 주간공사로 작업시간 변경 지시 : 시설관리과-20996(2016.10.14.)

○ 주간공사 굴착허가 및 경찰서 도로공사신고 변경을 위한 협의기간 12일 소요

다. 4구간 상수도관 부설위치 변경을 위한 유관기관과의 추가 협의기간 필요 : 10일

○ 4구간(상일동) 일부 구간(연장 160m)은 보도로 부설토록 설계 되었으나,         지하시설물이 과다하여 차도로 부설위치 변경이 불가피함

○ 굴착허가 변경을 위한 협의기간 10일 필요(10.24~현재 진행중)

라. 시설관리공단 검토의견

○ 계약업체가 제출한 준공기한 연기요청 사유 중 폐기물처리 지연(22일)과 2구간    및 4구간의 유관기관과의 추가 협의 기간(22일)은 타당하며,

○ 7구간(복조리시장)의 상인회 및 거주민에 대한 공사일정 협의는 타 구간 공사    진행중 협의가 가능하므로 준공기한 연기일수에서 제외

○ 상기 사유로 인한 절대 공기가 부족하므로 공사 준공기한 연기가 타당하다고     판단됨

○ 준공기한 연기 내용

- 당초 : 2016. 5. 9. ~ 2016. 11. 4.

- 변경 : 2016. 5. 9. ~ 2016. 12. 18(증44일)

Ⅲ		사업소 조치의견

○ 상기 준공기한 연기요청 사항에 대하여 검토한 바 타당하다고 판단되어 잔여 공사일정을 감안하여 부족한 공사기간에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 함.

- 당초 : 2016. 5. 9. ~ 2016. 11. 4.

- 변경 : 2016. 5. 9. ~ 2016. 12. 18(증44일)

- 연기사유 귀책 소재 : 강동수도사업소

- 지체상금 부과 여부 : 미부과

Ⅳ		행정사항

○ 준공기한 연기사항을 감독기관인 시설관리공단에 통보

○ 준공기한 연기에 따른 변경계약 시행

붙임 : 준공기한 연기 관련 공문 1부.  끝.