문서번호	시설관리과-29863
결재일자	2016.10.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	남부수도사업소장
구본천		천성훈	10/27 전영석
협조
	주무관		강동철

공사실정보고에 의한 사업소 검토의견 보고

(여의도동2~17번지외 1개소 송배수관정비공사)

2016. 10.

1. 제    목 : 현장실정검토보고에 의한 사업소 검토의견 보고

2. 관련근거

공사감독2처-13786(2016.10.18.)【현장실정검토보고서제출】

3. 공사현황

가. 공 사 명 : 여의도동2~17번지외 1개소 송배수관정비공사

나. 공사개요 : D=80~600㎜, L=480m

다. 공사기간 : 2016. 05. 16 〜 2016. 11. 28

라. 계약금액 : 390,944,010원

마. 시 공 사 : (주)대찬건설  대표 조재생

바. 감 독 자 : 서울시시설관리공단(공사감독2처)  담당 서홍석

4. 시설관리공단 보고 및 사업소 검토의견

연번	제목	시설관리공단 보고내용 및 조치의견	사업소 검토의견	비고
가	2구간 폐관충진 변경사항 검토	▶ 2구간 폐관 충진연장 D=600~700mm, L=580m 중 녹지대 및 체육시설구간 390m가 성토 및 나무 등 녹지대로 이루어져 있어 폐쇄관로를 찾기가 곤란하며 중차량 등의 하중이 작용하지 않아 도로함몰의 위험이 없는 구간으로 폐관충진 제외	〇 검토의견 : 녹지대는 2m 정도 성토되어 있어 폐쇄 관로 심도가 5m이상 될 것으로 추정되며 도로함몰 등의 위험이 없어 폐관충진 제외하는 것이 타당함 ※ 녹지대 320m충진제외 (영등포구청준설중간 집하장70m은충진포함)
		▶ 2구간 충진주입구와 공기배출구 용접시공은 작업 효율성을 고려하여 600/50mm새들천공 시공	〇 검토의견 : 원안 승인 - 검토결과 : 타당함. ※ 현장적용에 따른 시공품질관리 철저
나	2구간 B,C부 관로 부설 변경사항 검토	▶ B부 600mm관로폐쇄는 기 시공되어 제외	〇 검토의견 : 원안 승인 - 검토결과 : 타당함.
		▶ C부 600mm관로폐쇄시 단수범위가 넓어 단수범위를 축소하기 위해 부단수차단 (라인스토핑)하여 중간밸브설치후 시공	〇 검토의견 : 원안 승인 - 검토결과 : 타당함. ※ 현장적용에 따른 시공품질관리 철저

5. 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 서울특별시시설관리공단에 통보하여 공사 시행에 차질이 없도록 만전을 기하고자 합니다.

별첨 : 관련현황 각1부.  끝.