문서번호	시설관리과-25704
결재일자	2016.10.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이무규	문용욱	10/27 이병운
협 조

『신정배수지외 1개소 원격감시제어반 제작구매 설치』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2016. 10.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『신정배수지외 1개소 원격감시제어반 제작구매 설치』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

「신정배수지외 1개소 원격감시제어반 제작구매 설치와 관련하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 신정배수지외 1개소 원격감시제어반 제작구매 설치

○ 사업규모

- 신정배수지 원격감시제어반 3면

- 오류2증압장 원격감시제어반 1면

○ 계약기간 : 2016. 6. 20. ~ 2016. 10. 31.

○ 계 약 자 : 서우전기(주) 대표 백병육

○ 계약금액 : 금185,323,000원

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비)

□ 설계변경 심의사항

○ 심의일시 : ’16.10.27.(목) 09:30 4층 회의실

○ 계약금액

(단위 : 원)

당 초	변 경	증․감	비 고
185,323,000	183,835,460	감 1,487,540

○ 심의 주요내용

- 설계변경의 타당성

- 신규 공정에 대한 단가 적용의 적정 여부

- 주요 공정 물량 증․감 적정 여부

- 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

- 계약금액 조정 등

□ 설계변경 심의결과

○ 설계변경 : 타당

○ 신규공정 단가적용 : 적정

○ 주요공정 물량 증․감 사항 : 적정

○ 제경비 산정 적용 : 적정

○ 계약금액 조정 : 타당

□ 행정사항

○ 설계변경 시행 후 변경계약 의뢰

붙임 : 1. 설계변경 심의결과서 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 설계변경보고서 1부.  끝.