투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 변경계약 승인내용 통보(재사용플라자 건립공사)

우리 본부가 사업시행 중인『재사용플라자 건립공사』의 하도급 변경계약이 체결되어 붙임과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 하도급 변경계약 승인내용

공 종	하도급업체	회차	당 초	변 경	비 고
토공 및 흙막이 공사	씨이에프건설㈜ 대표 안장열	1차 변경	3,628,900,000	3,648,150,000	금액변경
			2015. 4. 6.~ 2017. 1.14	2015. 4. 6.~ 2017. 3.15	기간변경
철근콘크 리트공사	㈜세창공영 대표 양기석	1차 변경	3,265,000,000	4,016,100,000	금액변경
			2015.10.14.~ 2017. 1.14	2015.10.14.~ 2017. 1.14	변동없음
철골공사	㈜포유이엔지 대표 김형곤	1차 변경	144,100,000	295,339,000	금액변경
			2016. 4. 1.~ 2017. 1.14	2016. 4. 1.~ 2017. 1.14	변동없음

붙임  재사용플라자 하도급 변경계약(토공,철근콘크리트,철골공사) 통보서 1부. 끝.

	건축부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	10/25 김진용
협조자
시행	건축부-14569	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)