투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	재사용플라자 건립공사 건설사벙관리단 책임건설사업관리기술자 김 일 영 귀하
(경유)
제목	하도급 변경계약 승인통보(재사용플라자 건립공사)

1. PC재사용16-473(2016.10.21.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에 검토 보고한 재사용플라자 건립공사 하도급 변경계약(토공, 철근콘크리트, 철골공사)을 승인하오니 공정관리, 품질관리, 안전관리 등 건설사업관리용역 수행에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 하도급 변경계약 처리내용

공 종	하도급업체	회차	당 초	변 경	비 고
토공 및 흙막이 공사	씨이에프건설㈜ 대표 안장열	1차 변경	3,628,900,000	3,648,150,000	금액변경
			2015. 4. 6.~ 2017. 1.14	2015. 4. 6.~ 2017. 3.15	기간변경
철근콘크 리트공사	㈜세창공영 대표 양기석	1차 변경	3,265,000,000	4,016,100,000	금액변경
			2015.10.14.~ 2017. 1.14	2015.10.14.~ 2017. 1.14	변동없음
철골공사	㈜포유이엔지 대표 김형곤	1차 변경	144,100,000	295,339,000	금액변경
			2016. 4. 1.~ 2017. 1.14	2016. 4. 1.~ 2017. 1.14	변동없음

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	10/25 김진용
협조자
시행	건축부-14571	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)