문서번호	건축기획과-23040
결재일자	2016.10.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	녹색건축팀장	건축기획과장		주택건축국장
공경배	이성호	한병용		10/25 정유승
협 조
	주무관		윤별

- 저에너지 건축 표준모델 구축을 위한 -

건물에너지 효율화 및 태양광 시범사업 추진계획

2016. 10.

주택건축국

(건축기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	노원구
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

- 저에너지 건축 표준모델 구축을 위한 -

건물에너지 효율화 및 태양광 시범사업 추진계획

☞ 비용대비 효과가 큰 단열 등 성능을 높이는 방식의 효율화 모델 실현

☞ 친환경 녹색 건축물 활성화를 위한 건축물 신재생에너지 보급 확대

☞ 랜드마크 조성으로 건물 태양광 기술개발 및 디자인 향상 유도

1		추진근거

녹색건축물 조성지원법 제24조(녹색건축물 조성 시범사업 실시 등)

서울시 녹색건축물 조성계획 ‘16~’20(행정2부시장 방침 제72호, 2016.3.16.)

2		추진목표

기준 강화 및 지원으로 증가하는 건축물 부착 태양광의 표준모델 구축

건물 에너지효율화 기술(단열창호)에 대한 시공·감리지침 마련을 위한 효과검증

3		추진계획

사업개요

- 추진내용 : 공공건물에 단열창호 교체 및 태양광 설치 후 에너지절감성능 모니터링

☞ 시공단계부터 단열·기밀성능을 확인하고 설치 후 에너지절감량과 효율을 모니터링 하여 건물에너지 효율화의 효과 검증

☞ 설계부터 디자인과 효율을 고려하여 설치하고 성능 모니터링과 홍보를 통해 신재생에너지에 대한 시민 공감과 참여 확대 유도

- 사업대상

☞ 옥상 태양광 설치 : 노원구 상계2,9동 주민자치센터

☞ 단열창호 교체 : 노원구 보건소

- 선정기준

☞ 자치구 건물에너지 효율화 및 태양광 랜드마크 제안사업 예산 지원

☞ 자체 예산 편성하여 진행중으로 조기 실행 가능한 사업에 우선 지원

소요예산 : 70,000천원

- 산출근거

☞ 태양광 설치 : 14,200천원(6kw, 모니터링장비 포함) × 2개소 = 28,400천원

☞ 단열창호 교체 : 1식 × 40,000천원 = 40,000천원

☞ 모니터링비 : 1식(법면·수평일사, 온·습도 등) × 1,600천원 = 1,600천원

- 예산과목 : 주택건축국 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원, 건축물 공공성 강화, 녹색건축 활성화사업 추진, 자치단체자본보조(100-403-01)

4		대상사업

1) 상계 2,9동 주민자치센터 태양광설치사업

사업개요

- 위    치 : 노원구 상계로23길 17(상계2동), 한글비석로 487(상계9동)

- 규    모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 595㎡(상계2동)/ 지하1층, 지상3층,

연면적 795.28㎡(상계9동)

- 내    용 : 옥상 태양광 각 6kw 설치(모니터링 장비 포함)

설치위치(상계2동)	설치위치(상계9동)

소요예산 : 28,400천원(모니터링비 별도)

- 산출내역 : 14,200천원(6kw, 모니터링장비 포함) × 2개소 = 28,400천원

추진방법 : 예산지원(건축기획과), 공사 및 관리(노원구 건축과)

추진일정

- ‘16. 10            : 기초자료 조사

- ‘16. 11 ~ ’17.05 : 설계·공사 시행 및 준공

- ‘17. 06 ~ ’17.12 : 모니터링

2) 노원구 보건소 외부 창호 교체사업

사업개요

- 위    치 : 노원구 노해로 437

- 규    모 : 지하1층 지상4층, 연면적 3,504.62㎡

- 내    용 : 외부 AL창호 단열 창호로 교체

대상건물 전경	외부창호 설치 현황(AL창호)

소요예산 : 40,000천원(모니터링비 별도)

- 산출내역 : 외부 단열창호 1식 × 1개소 = 40,000천원

추진방법 : 예산지원(건축기획과), 공사 및 관리(노원구 건축과)

추진일정

- ‘16. 10            : 기초자료 조사

- ‘16. 11 ~ ’17.05 : 설계·공사 시행 및 준공

- ‘17. 06 ~ ’17.12 : 모니터링

5		행정사항

태양광 설치 계획 및 시공시 관계전문가 및 우리시 건물부착 태양광 설치기준 개발 용역업체 의견 반영(노원구)

단열성능 및 태양광 효율 등 모니터링 및 현장조사 등 협조(노원구)

- 사업시행 전·후 3년간 에너지 사용량 자료, 설치조건, 성능 모니터링 장비 부착 및 열화상카메라 테스트, 설문조사 등 현장 조사시 협조

현재 진행중인 건물부착 태양광 설치기준 개발 용역 등과 연계하여 효과적인 추진방법 도출(건축기획과)

붙임 : 노원구 예산지원 요청공문 및 사업내용 1부. 끝.