문서번호	공원녹지정책과-16842
결재일자	2016.10.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	공원녹지기획팀장	공원녹지정책과장
허향미	안수연	전결 10/28 代오종범

생활권 공원녹지조성사업 추가예산 재배정 검토보고

2016. 10.

공원녹지정책과

생활권 공원녹지조성사업 추가예산 재배정 검토보고

생활권 공원녹지조성 사업 대상지 중 추가로 필요 예산이 발생하여 검토하고 보고드림

1		사 업 개 요

○ 위    치 : 성북구 동선동4가 190(444㎡)

○ 사업기간 : ‘15. 01. ~ ‘16. 11. 30.

- 조경공사 : ‘15. 12. 18. ~ ‘16. 11. 30.

- 건물리모델링 : ‘16. 08. 30. ~ 11. 30.

○ 총 사업비 : 2,650백만원

- 2015년 : 2,500백만원(170백만원 사고이월)

- 2016년 : 150백만원

※ 2016년 예산현액: 320백만원(‘16본예산 150, 사고이월 170)

○ 사업내용 : 토지 및 건물 보상, 건물리모델링, 공원녹지 조성

- 2015년: 토지 및 건물 보상완료, 공원녹지조성(사고이월)

- 2016년: 건물 리모델링(주민 공동체 공간 조성)

○ 추가 예산 발생사유

- 건물 리모델링 공사 추진 중 현장여건 및 주민의견 반영에 따른 공종 추가 및 수량 조정으로 인한 설계변경이 불가피함에 따라 추가 예산 필요

2		예 산 현 황

○ 본 대상지 예산현황

(단위: 천원)

사업 대상지	①예산액	②기배정액	③재배정 잔액 ( ①-② )	④추가 예산 요청액	비고
동선동4가 190	150,000	145,870	4,130	34,000

3		검 토 의 견

○ 기존 건물을 활용하여 주민 커뮤니티 공간을 조성함으로써 주민 공동체 활성화에 기여하고자 건물 리모델링 공사를 추진 중으로,

○ 계단 벽면 미장 목재 철거 후 내부에 예상치 못한 조적벽돌 벽체가 있어 철거비용 발생 등 설계과정에서 예측할 수 없었던 현장 여건과 지역 주민의견 반영에 따른 추가 공종 발생 및 수량조정으로 설계변경이 불가피한 실정임

○ 쾌적하고 안전한 커뮤니티 공간 조성을 통한 사업효과 제고를 위해 본 사업 유보금 일부와 재배정 잔액을 활용하여 추가 필요예산 (34,000천원)을 지원함이 타당할 것으로 판단됨

4		행 정 사 항

○ 추가 필요 예산(34,000천원)에 대해 재배정 승인요청(⇒ 재무과)

○ 예산 재배정 통보( ⇒ 성북구)

붙 임  1. 관련공문 1부.

2. 내역서 1부.  끝.